문서번호	시설보수과-6092
결재일자	2018.11.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이생기		윤승범	11/05 이성재
협조
	주무관		이석근

『청계천 좌안 차집관로 물막이공사』

설계변경 시행보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『청계천 좌안 차집관로 물막이공사』

설계변경 시행보고

우리센터에서 시행중인 『청계천 좌안 차집관로 물막이공사』가 완료됨에 따라 아래와 같이 설계변경 시행코자 함.

1		사업개요

□ 공 사 명 : 청계천 좌안 차집관로 물막이공사

□ 공사기간 : 2018.06.01 ~ 2018.11.30

□ 사 업 비 : 588,659,990원

□ 도 급 자 : *************

□ 공사내용

- 차집관로 물막이, 물돌리기 : L=1,108m

- A계열 : 2.8x2.8m, 물돌리기 연장=554m

- B계열 : 2.4x2.4m, 물돌리기 연장=554m

2		설계변경 현황

□ 설계변경 금액내역

구 분		당 초	변 경	증 • 감	비 고
총사업비		588,659,990	671,064,000	증 82,404,010
도급비	공급가액	535,145,446	610,058,182	증 74,912,736
	부 가 세	53,514,544	61,005,818	증 7,491,274
	계	588,659,990	671,064,000	증 82,404,010

□ 설계변경 사유 : 물량증감 및 공종의 추가

3		조치의견

□ 위 와 같이 계약물량 증감 및 공종 추가 발생 증가로 설계변경금액 증액 발생에      따라 본청 계약심사과에 공사계약(설계변경) 심사 의뢰코자 함.

붙임 : 설계변경내역서 1부. 끝.