문서번호	시설보수과-6093
결재일자	2018.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	11/05 이성재
협 조
	주무관			이석근

『우이천외 3개 하천 차집관로 보수공사』

실정보고서 검토보고

2018.11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『우이천외 3개 하천 차집관로 정비공사』

실정보고서 검토보고

우리센터에서 추진중인 『우이천외 3개 하천 차집관로 정비공사』의 도급자로 부터 시공물량 상이사항에 대한 실정보고서가 접수되어 이에 대한 검토 보고임

1		사업개요

□ 사 업 명 : 우이천외 3개 하천 차집관로 정비공사

□ 위    치 : 우이천, 인수천, 백운천, 대동천

□ 사업기간 : ‘18.08.10 ~ ’18.12.31

□ 사 업 비 : 758,034,200원

□ 도 급 자 : 지알경(주) 대표 김태환

□ 공사내용 : 표면보수 9,549㎡, 단면보수 101㎡, 콘크리트 균열보수 L=70m

2		실정보고 내용

□ 강우로 인한 인수천 하천정비공사(강북구청) 시행 및 실측 물량 상이

(표면보수 3,115㎡→1,390㎡ 감 1,725㎡)

□ 백운천 하천정비공사(석축공사,강북구청 시행) 물량 감소 및 실측 물량 상이

(표면보수 979㎡→187㎡ 감 792㎡, 단면보수 5㎡→0㎡ 감 5㎡)

□ 대동천 실측 물량 상이

(표면보수 1,630㎡→1,436㎡ 감 194㎡)

□ 우이천 실측 물량 상이 및 단면보수 25m구간 누락

(표면보수 3,825㎡→2,640㎡ 감 1,185㎡, 단면보수 87㎡→110㎡ 증 23㎡)

3		검토결과

□ 현장조사결과 강우로 인해 강북구청에서 시행한 하천정비공사와 실측 물량 상이로 물량이 감소됨(금 297,343천원 감액)

※ 전체물량 증ㆍ감

- 표면보수 9,549㎡ → 5,652㎡  감 3,897㎡

- 단면보수   101㎡ →   119㎡  증     18㎡

4		조치의견

□ 백운천 및 인수천은 강북구청 하천 정비공사로 인해 감소된 구간 물량과 우이천 및 대동천 실측 물량 감소분으로 차집관로 표면 열화로 상태가 좋지 않은 정릉천 시점 하류 부분에 대해 추가 정비토록하고 추후 설계변경에 반영 정산 처리코자 함.

- 정릉천 추가 물량(금110,53천원)

ㆍ1,360㎡ × 81,274원 = 110,532천원

붙임  1. 관련문서 및 수량산출서 1부.

2. 정릉천 위치도 및 현황사진 1부.  끝.