문서번호	건축부-15625
결재일자	2018.11.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		의료시설과장	건축부장
문성재		이형재	11/05 임인구
협조
	주무관		조문석

「시립중랑노인전문요양원 증축공사」

건설폐기물 처리용역 설계변경 검토 보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「시립중랑노인전문요양원 증축공사」

건설폐기물 처리용역 설계변경 검토 보고

시립중랑노인전문요양원 증축공사 건설폐기물처리용역에 대하여 실정보고 및 일부정산 수량에 대하여 설계변경 요청에 따른 적정여부 검토 보고임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 시립중랑노인전문요양원 증축공사 건설폐기물 처리용역

○ 위    치 : 서울시 중랑구 양원역로 38(망우동 227)

○ 규    모 : 지하1층/지상5층, 연면적 2,280.35㎡

○ 용역기간 : *************************

○ 용역금액 : ***********

○ 용역사/감리사 : ***********************

○ 용역내용 : 건설폐기물 수집․운반 및 처리

- 처리물량 : ******************************************************************************************

□ 설계변경 내용

○ 관련근거

- 건설폐기물 처리용역 과업내용서 4. 설계변경(폐기물의 성상변경 및 수량변경 등)

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경관리 등)

- 용역업체「매립폐기물처리 정산 및 설계변경」(2018-250호: 2018.10.26.)

- PC18(시립요양원)-161(2018.10.31.) 책임건설사업관리기술자 “매립폐기물처리 정산 및 설계변경 요청 기술검토 보고”(보완)

○ 변경사유

- 조경부분 임목폐기물 처리완료 정산(공사부지내 수목 폐기물량: 2018.01.31. 반출완료)

- 폐기물 성상추가 및 내역조정: 건축부-2346(2018.02.20.) 실정보고 승인 건

- 지중 매립폐기물 실정보고 건 정산: 건축부-6730(2018.05.09.) 실정보고 승인 건

- 폐기물 용역기간 연장: 북측도로 철거부분 건축 준공시점에 철거, 기타 최종정산

○ 공사비 증감내역

(단위 : 원)

****	*****	*****	*********	***
*******	**********	**********	***********
*******	**********	**********	***********	***********
********	*********	*********	**********
*****	**********	**********	***********

○ 변경 세부내역

(단위 : 원)

**	**	***	***		***		**		****
			*****	**	** ***	**	** ***	**
**	** **	***** **** ****	******	*********	******	*********	*	*	***
**	**	*****	******	*********	******	*********	******	**********	******* ************ *************
		*****	******	*********	******	*********	*	*
		*****	*	*	******	*********	******	**********
	**	***** ******	******	*********	******	*********	******	**********
		***** ******	*	*	******	*********	******	**********
**	**	*****	*****	*******	*****	*******	******	********	******* *************
	**	*****		******		*******
*		*******		**********	*******	**********	*******	***********

※  폐콘크리트: 계량대장 반출량 317.93톤+잔여량 23.53톤=341.46톤(-159톤=182.46톤)

폐블록 등 : 계량대장 반출량 76.42톤+잔여량 31.58톤=108톤(신규)

임목폐기물: 계량대장 반출량 10.29톤-4.937톤=5.353톤(완료)

○ 폐기물처리 용역기간 변경 검토

*****	*****	*****
*********************** ******	*********************** ******	******************************* ******************************

□ 감리자 검토의견

○ 정산수량 산출 검토(2018.01.31.~2018.07.14. 까지 계량대장 참조)

- 설계변경내역서 정산수량산출서 검토결과 적정함

- 변경 토목수량 집계 및 변경수량 산출서 검토결과 적정함

○ 단가의 적정성 검토

**	*****	*******	***
*******	************* ************************************** ***************************** *************************** ****************	************ ************* ************ **************	*****

○ 검토결과

- 금회 폐기물처리업체 매립폐기물처리 정산 및 설계변경 요청사항은 당현장 지하 굴착공사와 토목 철거공사중 발생 매립 폐기물은 2018년 7월 14일 실 발생량으로 정산

- 처리단가 신규 항목인 폐블록은 당사업 설계가 산정시 적용한 “한국건설자원협회”공표 가격과 3개업체 견적가중 최저가 준용하여 낙찰가를 적용

- 건설폐기물 처리용역기간 연장은 현장북측 대지경계선 밖 보도와 도로 일부구간 철거부분 및 현장동측 조경구간 설계변경 예정사항으로 건축 준공일정에 맞추어 연장

- 용역업체에서 제출한 매립폐기물 정산 및 설계변경 요청의 변경사유, 정산수량, 단가의 적정성등과 계량대장 등 검토결과 적정하다고 판단하며 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 제13장 공사계약 일반조건 제6절 1.설계변경 가.1)설계서 오류 2)공사현장 상태가 설계서와 다른 경우에 해당하여 설계변경함이 타당하다 사료됨

□ 조치의견

○ 책임건설사업관리기술자가 제출한 “매립폐기물처리 정산 및 설계변경 요청 기술검토 결과 보고” 에 대한 설계변경 검토가 적합하므로 건설폐기물용역 계약을 변경하고 계약기간을 연장 하고자 함

붙임 : 책임건설사업관리기술자 설계변경 검토결과 보고(보완) 각 1부.  끝.