투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기간 연장 의뢰[동부간선도로확장 3공구(방음벽구간 등) 통신공사]

우리 본부에서 추진중인 『동부간선도로 확장 3공구(방음벽구간 등) 통신공사』에  대하여 아래와 같이 준공기간 연장를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기간 연장 내용

구 분		공사기간		비 고
		당 초	변 경
총차1회	도급비 (총차)	1,069,571,050원	변경없음
	공사기간	’17.04.26～ ’18.12.31	’17.04.26～ ’19.12.31	증)365일

나. 연장사유 : 토목공정 일정에 맞춰서 공사기간 연장

다. 귀책사유 : 도시기반시설본부

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 연장 검토보고 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	박병환		시책사업과장	임병국		설비부장	11/06 권오식
협조자
시행	설비부-15147	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8648	/전송	02)3708-8659	/	pbhw2002@seoul.go.kr	/	부분공개(7)