문서번호	공공재생과-10668
결재일자	2018.11.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관	특화공간조성팀장		공공재생과장		재생정책기획관		도시재생본부장
김방용	신명승		홍선기		김성보		11/06 강맹훈
협 조

「남산 예장자락 재생사업 설계용역」

준공에 따른 지연배상금 검토보고

2018. 11

도시재생본부

(공공재생과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

「남산 예장자락 재생사업 설계용역」

준공에 따른 지연배상금 검토보고

남산 예장자락 재생사업 설계용역 준공에 따른 지연배상금 산정에 대해 검토하고 그 조치계획을 보고드림

검토배경

❍ 남산 예장자락 재생사업 설계용역의 준공기한 경과로 지연배상금 발생

❍ 지연배상금 발생과 관련 분쟁소지가 있어 입장정리 필요

추진경위

❍ `16. 4. 8.	********* 계약체결

❍ `16. 9.29.~	`17.10.13.	부분준공검사(1차~4차)

❍ `17.11. 6.	**** 계약체결

❍ `17.11.15.~`18. 7.30.	1차~5차 설계보완 제출

❍ `18. 2.12.	측량보고서 제출

❍ `18. 9.17.	********* 준공서류 제출

❍ `18.10.31.	**** 준공서류 제출

지연배상금 산출

사 업 명		**********************	*****************
용 역 사		***********	********
계약금액		***********	********
	기지출액	***********	********
	미지출액	*********	*******
용역기간		***********************	************************
준공일(지연일)		********************	*********************
*******		*********	*******
	*******	****************** **************************	****************** ***********************
	법령근거	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조 제1항 계약상대자는 계약상의 의무를 지체하였을 때에는 지연배상금으로서 계약금액에 행정안전부령으로 정하는 비율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다

현안사항

**********************************

******************************************

*****************************************************

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조 제2항

제1항의 경우 기성부분 또는 기납 부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수한 경우에는 그 부분에 상응하는 금액을 계약금액에서 뺀 금액을 기준으로 지연배생금을 계산하여야 한다. 이 경우 기성 부분 또는 기납 부분의 인수는 성질상 분할할 수 있는 공사․물품 또는 용역 등에 대한 완성부분으로서 인수하는 것으로 한정한다.

*******************************************

*************************************************

***********************************************************************************************************************************************

검토결과

*******************************

**********************************************************************************

*********************************************************************

***************************************************************************

****************************************

************************************************

조치계획

****************************************

*********************************************

************************************************

****************************************************

향후일정

****************************************

******************************************

**************************************

***************************

**************************************************

붙 임 : 1. 추진경위(상세) 1부

2. 관계법령 등 1부

3. 신문고 등 유권해석 1부. 끝.