문서번호	급수운영과-27266
결재일자	2018.11.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이훈재		권기섭	11/06 송근호
협조

공사 기성금 지급 적정성 검토 보고

(군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

동부수도사업소

(급수운영과)

공사 기성금 지급 적정성 검토 보고

우리사업소에서 시행하는『군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사』의 감독기관인 서울시설공단으로부터 2018. 10. 31.(수) 기성검사(감독) 조서가 접수되어 기성대가 지급에 따른 적정성 검토 보고임.

※ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 제39호 2018. 7. 9.)

제13장 공사계약일반조건 제9절 검사와 대가지급 규정(4. 기성대가의 지급)

□ 공사현황

○ 공 사 명: 군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사

○ 공사개요: 관 부설 D=700~1,000mm, L=42m

(기존관 폐쇄 D=900~1350mm, L=2,650m)

○ 공사기간: 2018. 5. 28.~2018. 12. 23.

○ 계약금액: ************

○ 계약상대자: ***포제이스건설  대표 정선태

□ 기성검사(1회) 개요

○ 기성일자: 2018. 10. 25.

○ 기성금액: 413,419,600원(금사억일천삼백사십일만구천육백원)

○ 기성검사일자: 2018. 10. 30.

○ 공 정 율: 46.45% (공사 추진율: 93%)

□ 계약금액 집행(예정) 현황

공 사 명	집행(예정) 현황
	계약금액	기집행	금회청구 (기성금 1회)	잔액
군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사	890,065,840	241,186,000	271,491,850	***********

○ 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축비, 시설비(노후 상수도관(송배수관) 정비)

○ 기집행금액: 185,350,000원(선급금) + 26,317,500원(8월 노무비) + 29,518,500원                 (9월 노무비) = 241,186,000원

○ *********************

************************************************************

○ *********************선금정산액 이상을 정산)

가. 선금정산액 = 선금액 × 기성(기납) 부분의 대가상당액/계약금액

******************************************************

□ 검토사항

○ 검토사항: 기성 세부내역 타당성 검토

○ 기성 세부내역(내역서 별첨)

비 목	계약금액	기성금액(1회)		집행잔액		비고
		금 액	비율	금 액	비율
재 료 비	277,657,917	145,813,186	52.5%	131,844,731	47.5%	타당
노 무 비	271,934,718	129,832,593	47.7%	142,102,125	52.3%	타당
경 비	150,634,249	51,651,327	34.3%	98,982,922	65.7%	타당
일반관리비	38,512,478	19,637,826	51.0%	18,874,652	49.0%	타당
이 윤	69,159,554	28,901,068	41.8%	40,258,486	58.2%	타당
고재처리비	-1,684,152		0.0%	-1,684,152	100.0%	타당
부지임대료	2,936,000		0.0%	2,936,000	100.0%	타당
공급가액	809,150,764	375,836,000	46.4%	433,314,764	53.6%	타당
부가가치세	80,915,076	37,583,600	46.4%	43,331,476	53.6%	타당
도 급 액	890,065,840	413,419,600	46.4%	476,646,240	53.6%	타당

□ 조치의견

○ 시설공단에서 제출한 기성내역서 및 기성검사조서 등 관련서류 검토결과 적정하다고 판단되므로 관련부서(행정지원과)와 협의하여 기성금 지급 등 후속 업무를 추진하고자 합니다.

붙임  관련자료(기성검사조서, 기성내역서, 도면 기성요청서 등) 각 1부.  끝.