＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	공사 기성대가 지급 의뢰(군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사, 1회 기성)_정정

1. 공사감독2처-16768(2018. 10. 30.)호, 급수운영과-26971(2018. 11. 2.)호 및 행정지원과-29094(2018. 11. 6.)호와 관련한 사안입니다.

2. 서울시설공단 공사감독(위탁)으로 시행하는 「군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사」에 대하여 기성검사(감독) 조서가 제출되어 관련사항을 검토하고 아래와 같이 기성대가 지급 요청하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사

나. 공사기간: 2018. 5. 28.~2018. 12. 23.

다. 계약금액: ************

라. 계약상대자: ***포제이스건설  대표 정선태

마. 기성금액: 413,419,600원(금사억일천삼백사십일만구천육백원)

바. 기성기간: 2018. 5. 28.~2018. 10. 25.

사. 기성검사일자: 2018. 10. 30.

아. 공 정 율: 46.45% (공사 추진율: 93%)

자. 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축비, 시설비(노후 상수도관(송배수관) 정비)

차. 예산 집행(예정) 현황

계약금액	기집행	금회지급액 (기성금 1회)	잔 액	비 고
890,065,840	241,186,000	271,491,850	***********	※ 금회지급액: 기성금액 – 대금e바로노무비 - 선금정산액

○ *********************

‣**********************************************************

○ *********************선금정산액 이상을 정산)

‣ 선금정산액 = 선금액 × 기성(기납) 부분의 대가상당액/계약금액

******************************************************

붙임  1. 기성대가 지급 적정성 검토 보고 및 선금정산내역 각 1부.

2. 기성검사(감독) 조서 1부.

3. 기성검사 사진대지 및 기성내역서 각 1부.

4. 기성검사원 및 관련자료 각 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	이훈재		급수설비팀장	권기섭		급수운영과장	11/06 송근호
협조자
시행	급수운영과-27363	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소 (행당동142-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2750	/전송	3146-2789	/	lhj1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)