문서번호	시설관리과-30634
결재일자	2018.11.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장
강정구	11/06 천성훈

설계변경 검토 보고(2018년 중랑, 동대문구 관내 상수도 단위공사장 건설폐기물 처리용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.11

설계변경 검토 보고

2018년 중랑, 동대문구 관내 상수도 단위공사장 건설폐기물 처리용역과 관련하여 건설폐기물 운반 및 처리 수량 변경 사항이 있어 아래와 같이 설계변경하고자 합니다.

Ⅰ		용 역 현 황

1. 용 역 명: 2018년 중랑, 동대문구 관내 상수도 단위공사장 건설폐기물 처리용역

2. 용역기간: 2018년 5월 15일~2018년 12월 20일

3. 도 급 액: 119,630,000원

4. 용역개요: 폐기물 운반 1,670㎥, 폐기물 처리 3,917톤

5. 도 급 자: 태성기초산업(주) 윤영춘

Ⅱ		보 고 내 용

1. 2018년 중랑, 동대문구 관내 상수도 단위공사장 건설폐기물 처리용역과 관련하여 건설폐기물 운반, 처리 수량의 변경(증⋅감)으로 아래와 같이 설계변경 하고자 합니다.

2. 수량 및 용역비 증⋅감 현황

구 분		당 초	변 경	증⋅감	비 고
건설페기물 운반(㎥)	폐아스콘	1,516.8	1,367	감)150
	폐콘크리트	153.7	329	증)175
	폐토석		760	증)760	전농동 배급수관 신규발생
	계	1,670.5	2,456	증)785.5
건설폐기물 처리(톤)	폐아스콘	3,564	3,212	감)352
	폐콘크리트	353	757	증)404
	폐토석		1,292	증)1,292	전농동 배급수관 신규발생
	계	3,917	5,261	증)1,344
용역비(천원)		119,630	164,373	증)44,743	증) 37.4%

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 상기와 같이 2018년 중랑, 동대문구 관내 상수도 단위공사장 건설폐기물 처리용역은 도급비가 약37.4% 증가되어 계약금액 조정심사 대상으로 자체 설계변경 심의 후 본부 재무회계과에 계약금액 조정심사 요청하여 처리코자 합니다.

붙임: 1) 설계변경 사유서 1부.

2) 변경내역서 1부.

3) 공사장별 폐기물 수량 1부.

4) 공사실정 보고서 1부.  끝.