＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 계약 의뢰(가산동 459-40~533번지외 4개소 배급수관 정비공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 「가산동 459-40~533번지외 4개소 배급수관 정비공사」 에 대하여 설계     변경을 시행하고 아래와 같이 설계변경 계약 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 가산동 459-40~533번지외 4개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요 : 당초 D=25~300㎜, L=1,252m

변경 D=25~300㎜, L=1,304m

다. 공사기간 : 2018. 4. 9. ~ 2018. 11. 19.

라. 계 약 자 : 오성씨앤씨(주)  대표 오성남

마. 설계변경 내역                                                             (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증.감	비 고
도 급 비	***********	*************	*************

바. 설계변경 사유 : 공종별 계약물량 증.감 및 신규 공종 발생

사. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비(노후상수도관(배급수관)정비)

붙임  설계변경 시행 및 관련서류 각1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	김재엽		주무관	강동길		급수운영과장	11/06 이성환
협조자
시행	급수운영과-22282	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4557	/전송	3146-4589	/	yeup2424@seoul.go.kr	/	부분공개(5)