문서번호	건축부-15673
결재일자	2018.11.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
김완선		박범규	11/06 임인구
협조	복지시설팀장		송정윤
	주무관		김동석

『서울시 근로자복지관 증축공사 건설사업관리용역』

설계변경 실정보고 검토 보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(건축부)

「서울시 근로자복지관 증축공사 건설사업관리용역』

설계변경 실정보고 검토 보고

『서울시 근로자복지관 증축공사』 건설사업관리용역 설계변경관련 실정보고에 대하여 검토 보고 드림

Ⅰ		실정보고 근거

관련문서

- 영진근복 제18-05호(2018. 10. 30.) 건설사업관리용역 설계변경에   대한 실정보고

건설사업관리 용역 설계변경(1차)에 대한 검토

- 준공 후 인수인계 및 안전성을 고려하여 용역기간 연장 필요

① 『건설사업관리 용역』 기간 변경

구 분	당 초	변 경	증 (감)
용역 기간	2018.10.12. ~2019.06.11. (8개월)	2018.10.12. ~ 2019.06.30. (9개월)	증 1개월

② 기술지원기술자(비상주) 추가 투입

구 분	당 초	변 경	증 (감)
건축분야 기술지원기술자(비상주)	11일	14일	증 3일
소방분야 기술지원기술자(비상주)	11일	22일	증 11일
소 계	22일	36일	증 14일

Ⅱ		예상 변경 용역비

용역비 검토

(단위:원)

구 분	사업관리용역
	당초	변경	증 (감)
투입 인원	168인	194인	증 26인
용역 금액	93,218,000원	107,000,000원	증 13,782,000원

Ⅲ		처리의견

건설사업관리단 기술검토 내용이 적정하므로 실정보고 승인

실정보고는 승인하여 용역기간 연장 및 기술지원기술자 추가투입을 시행토록하고, 변경금액에 대하여는 향후 준공 전 조치코자 함.

붙임 : 감리계약변경 실정보고 1부.  끝.