문서번호	세무과-23866
결재일자	2018.11.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		세무정보화팀장	세무과장
박경여		안효무	11/07 조조익
협조

「2018년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업」

월  간  보  고 (10월)

2018. 11

재무국

(세무과)

「2018년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업」

월  간  보  고 (10월)

세무종합시스템의 안정적 운영과 서비스 개선을 위해 추진하고 있는『2018년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업』의 10월중 주요 추진과업 내용과 11월 추진계획에 대하여 보고함.

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사업기간 : `18. 1. 1 ~ 12. 31

□ 계약업체(금액) : ㈜씨와이디 정보기술(1,408백만원)

□ 주요 사업내용

○ 응용프로그램 추가개발 및 기능개선

- 세무조사 통합관리․지방소득세(연말정산 일괄감액 등)․담배소비세(통계 등)

- 재산세(정기분 대장구축 다중처리 등)․납세자 개번/개명 통합관리 등

- 가상계좌 관리개선․전자고지(전자송달 세액공제 등)․기타 필요기능 개선

○ 응용프로그램 유지관리 및 운영

- 지방세 부과 징수업무 지원, 사용자 요구사항 반영 및 보완

- 시스템 운영 및 유지관리, 장애예방 및 장애발생에 대한 복구 등

○ 시스템 S/W 유지보수 및 기술지원

- S/W 정기점검 및 기술지원, 장애예방 및 장애발생에 대한 복구 등

Ⅱ		월간보고회의 개최

□ 일시 : `18. 11. 5.(월) 14:00

□ 장소 : 서소문별관 1동 9층 세무과 회의실

□ 참석 : 세무정보화팀 사업관련 담당자, 사업 수행사

□ 내용 : `18년 10월 과업진행 추진실적 및 11월 추진계획 등 보고

Ⅲ		주요과업 처리내용

□ 주요과업 추진실적

과업 구분			총 과업	완료과업			진행과업			잔여과업
				누적합계		10월 완료	합계	진행	지연
신규			16	10		3	5	4	1	1
보완			42	34		8	7	6	1	1
총계			58	44		11	12	10	2	2
유지관리 (운영지원)		중요	12	12		0	0	0	0	0
		상시	1,840	1840		197	0	0	0	0
합계			1,852	1,852		197	0	0	0	0
10월 11개 과업 완료
					-SFR-002[지방소득세]납세지 오류로 인한 지자체간 세입경정 절차 전산화 -SFR-009[재산세] 산출세액 멀티 시뮬레이션 기능 개발 -SFR-015[연계]다산콜센터 연계 -MAR-011[지방소득세]양도소득분 신고분 서식 단계별 등록 기능 -MAR-013[취득세]부동산취득세 유형별 보고 및 집계표 관리 개선
	-MAR-017[공통_도움말]사용자 화면의 팝업/버튼별 도움말 등록관리 -MAR-027[압류,경공매,체납]지방세징수법 관련 출력서식 변경 -MAR-028[영치‧징수촉탁]기능보완 및 관리화면 정비 -MAR-036[과세자료통합]시스템 연계보완(위택스연계) -MAR-038[자동차세]공동 소유자3인 이상 추가 기능(위택스 연계) -MAR-039[자동차세]타시도 이전 차량 이전/폐차/말소 연계 기능 추가(위택스 연계)
11월 12개 과업 계속진행
	-SFR-001[세무조사]법인 세무조사관리 기능개선 -SFR-003[지방소득세]주소지 환급(타시군 과오납) 자료 공유 -SFR-007[법인지방소득세]위택스 연결법인 경정청구․수정신고 연계처리 -SFR-013[납세자관리]납세자 개번․개명 통합관리 -SFR-016[총괄과세] 납기문자알림 일괄발송 서비스 -MAR-001[담배소비세]특별징수세액 타시도 지급요청 연계 및 전산통보 -MAR-006[주민세]종업원분.재산분의 결정(경정)청구관리 -MAR-010[지방소득세]특별징수 정산이후 경정 및 수정발생자료에 대한 재정산 처리 -MAR-022[총괄과세]납기 문자알림 일괄 발송 서비스 -MAR-026[체납_38, 지역]체납가산금의 시점 및 지분별 관리 -MAR-029[환급]지방세환급금 충당처리 개선 -MAR-032[납세자 관리]외국인 고용정보 연계 및 체류지 현행화
11월 2개 과업 추가진행 예정
	-SFR-010[재산세]정기분 통계프로그램 기능 개발 -MAR-024[전자고지]금융앱 전자고지 단독고지

따로붙임 1. 2018년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 월간보고서(10월)  1부.

※ 투입인력 임금지급확인 포함

2. 월간 업무현황 보고서  1부.

3. 월간 추진현황표(WBS)  1부.

4. 산출물(SFR-002외 9식_별도첨부) 각 1부.

5. 회의록 각 1부.