문서번호	공원사업과-2123
결재일자	2018.11.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	공원사업과장	공원부장
박지해	송경수	11/07 김인숙

「2018년 뚝섬한강공원 엑스게임장 정비공사」준공보고

2018. 11.

한강사업본부

(공원사업과)

「2018년 뚝섬한강공원 엑스게임장 정비공사」준공보고

우리 본부에서 시행한 「2018년 뚝섬한강공원 엑스게임장 정비공사」 가 완료되었기에 아래와 같이 준공사항을 검토하여 보고드립니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 뚝섬한강공원 엑스게임장 정비공사

○ 공사내용 : 엑스게임장 바닥 정비 및 기물교체 등

○ 공사기간 : 2018. 6. 21. ~ 2018. 10. 31.

○ 총공사비 : ************************************************

○ 도급업체 : ****************

□ 준공내역

구 분	시 공 내 역	비 고
철거공	경질 우레탄포장A철거(T3, 적색) 1,345㎡ 경질 우레탄포장B철거(T3, 녹색) 2,770㎡ 포장균열 이물질제거 60m 콘크리트줄눈이물질제거 1,830m
포장공	균열수직재충진 60m 줄눈부수직재충진 1,830m 우레탄포장A(T2, 적색) 1,345㎡ 우레탄포장B(T2, 녹색) 2,770㎡ 라인마킹A(흰색, 화살표) 5개소 라인마킹B(노란색, 파선) 950m
기물정비공	기물F교체 등 7개소, 고밀도판넬교체 26매 기물철거 1식
폐기물운반및처리	폐기물운반(중간처리, 40km) 4ton, 우레탄폐기물 17ton 콘크리트폐기물 4ton, 우레탄폐기물 17ton
관급자재	폴리우레아수지도막방수제(T2) 4,115㎡

□ 추진경위

○ 2018.   3.   9 : 뚝섬한강공원 엑스게임장 정비사업 추진계획 수립

○ 2018.   4.  27 : 서울시 계약심사 요청

○ 2018.   5.  21 : 공사발주

○ 2018.   6.  18 : 공사계약

○ 2018.   6.  21 : 공사착공

○ 2018.  10.  31 : 공사준공

□ 정산금액

○ 준공(정산) 금액 : *************

(단위:원)

구 분		당 초	준 공	증 감	비 고
총공사비		***********	***********	-
도급비	공급가액	**********	**********	-
	부가가치세	**********	**********	-
	계	***********	***********	-
관급자재비		***********	***********	-

□ 검토의견

○ 설계도서와 같이 시공이 완료됨에 따라 준공 처리(총무과 통보)하고자 함

붙임  1. 준공사진 1부.

2. 준공(정산) 내역서 1부.  끝.