문서번호	시설보수과-6172
결재일자	2018.11.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이생기		윤승범	11/07 이성재
협조

『청계천 좌안 차집관로 물막이공사 건설사업관리

(시공감리) 용역』

실정보고서 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『청계천 좌안 차집관로 물막이공사 건설사업관리 용역』

실정보고서 검토보고

우리센터에서 추진중인 『청계천 좌안 차집관로 물막이공사 건설사업

관리 용역』의 도급자로 부터 실정보고서가 접수되어 이에 대한 검토 보고임 [이준100-161호(2018.11.6.)]

1		용역개요

□ 용역명 : 청계천 좌안 차집관로 물막이공사 건설사업관리(시공감리) 용역

□ 용역기간 : ‘18.08.01 ~ ’18.11.30

□ 용 역 비 :************

□ 도 급 자 : *****************

□ 용역내용 : 물막이공사(규모: A2.8x2.8 B2.4x2.4m L=1,108m) 시공감리

2		실정보고 내용

□ 상기용역 설계상에 국토교통부 고시 건설사업관리 대가기준 의거 투입인원수

(인.월) 고급기술자(고급대가)를 기준으로 하도록 되어 있으나,

□ 투입개월 3.0개월에 환산비(0.830)를 곱하여 산출된 투입인원(인.월) 2.49인.월      수량이 중급기술자 기준으로 적용되어 있는 실정임.

□ 용역의 완수(준공)기한도 본 공사인 청계천 좌안 차집관로 물막이공사 준공

기한과 동일하게 ‘18.11.30일로 연기 조치되어 투입개월도 늘어날 실정임.

※ 국토교통부 고시 제2014-298호(2014.05.23.)의 건설사업관리 대가기준

- 건설사업관리기술자 배치기준에 의거 투입인원수는 고급기술자를 기준으로 한다

- 적용수량은 단위 중 1개월의 기간은 22일을 기준으로 한다.

3		검토결과

□ 위 보고내용과 같이 투입기술자가 중급임으로 투입인원수(인.월) 2.49인.월        고급임금 단가를 적용하지 않고 중급임금 단가를 적용했읍므로 투입인.월        수량이 3.0인.월로 증가함으로 증액(***********) 조정.

*****************************************************    *****************************************************

4		조치의견

□ 과업수행에 필요한 투입기술자가 중급임으로 임금도 중급임금을 적용하여

용역수행에 만전을 기 하고자 함.

□ 위 사항을 용역 계약업체 *****************에게 통보 하고자 함.

붙임 : 실정보고서 1부.  끝.