내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경계약 요청(낙산성곽길 전망대 기본 및 실시설계)

1. 주거환경개선과-11801(2018.11.6.)호와 관련된 문서입니다.

2. 우리시와 계약을 체결하여 시행 중인 낙산성곽길 전망대 기본 및 실시설계 2건에 대하여 아래와 같은 사유로 설계변경을 요청드리오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요 및 설계변경 내용

용 역 명	계약자 (대표)	구 분	당 초	변 경	비고
하늘정원 전망대 조성 기본 및 실시설계	********* *****	용 역 비	********	********	*********
		과업기간	‘18.8.9~ ’18.11.07	‘18.8.9~ ’18.12.28	증 50일
낙산공원 정상 전망대 조성 기본 및 실시설계	********** *********	용 역 비	********	********	********
		과업기간	‘18.8.10~ ’18.11.08	‘18.8.10~ ’18.12.28	증 50일

나. 변경 사유 : 과업추가에 따른 금액 변경 및 과업기간 연장

- ******************************************

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.
2. 설계변경 내역서 각1부.
3. 과업내용서 각1부.
4. 합의서 각1부.  끝.

	주거환경개선과장
주무관	권경희		주거환경정책팀장	노경래		주거환경개선과장	11/07 남정현
협조자	계약2팀장	이태영
시행	주거환경개선과-11850	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-7248	/전송	02-2133-0753	/	kkh1228@seoul.go.kr	/	부분공개(5 7)