과 장		11/07 유태용	심사자	김동민		설계자	정회곤		설 계	심 사		결 재
									2018년11월 일	2018년11월 일
설 계 변 경 서(정산)
	용역명 : 2018년 노후포장도로 정비공사(강서1구역) 폐아스콘 운반 및 처리용역(정산)
	구 분				금 액						비 고
					당 초			변 경			증.감
	총 공 사 비				금 382,354,000원			금 385,470,000원			증 3,116,000원
	도급비	공 급 가 액			금 347,594,545원			금 350,427,273원			증 2,832,727원
		부 가 가 치 세			금 34,759,455원			금 35,042,727원			증 283,273원
		계			금 382,354,000원			금 385,470,000원			증 3,116,000원
공사개요 - 당 초 : 폐아스콘 운반 및 처리 21,877톤 - 변 경 : 페아스콘 운반 및 처리 22,055톤