문서번호	설비부-15259
결재일자	2018.11.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	열빛총괄과장
김현욱	11/08 유병기

『강남순환도시고속도로(8공구) 구룡지하차도 전기공사』

설계변경 소위원회 자문요청

2018. 11.

도시기반시설본부

[ 설 비 부 ]

설계변경 소[본부]위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		열빛총괄과		요청일		2018년 11월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(8공구)구룡지하차도 전기공사
공사개요	공사규모		-폭원 4-8차도 , 연장 1.17 KM
	공사기간		2002. 07. 03. ~ 2022. 12. 31.
	감 리 사		㈜동명기술공단건축사사무소
	설 계 사		㈜진영전력
	시 공 사		㈜진영전력
자문 안건명			대모지하차도 가로등 시공 정산				요청금액		증) 190,800천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 강남순환도시고속도로 8공구 구룡지하차도 전기공사와 관련하여 추가로 신설되는 대모지하차도 공사의 도로확장공사를 위한 중분대에 설치된 2등용 가로등을 철거하고 좌,우측(과천 및 수서방향) 보 도구간에 1등용 가로등을 설치 및 이설하는 실정보고 건에 대한 적정성 여부를 검토코자 함.
감리단 의견(요약) ○ 내용 : 상기 내용과 같이 강남순환도시고속도로 8공구 구룡지하차도 전기공사 중 추가로 신설된 대모지하차도 공사의 가로등 철거 및 설치에 대한 공사비 반영이 필요함. 가로등 설치 및 철거, 이설에 대한 공사비 산정은 적정하다고 판단되며 추후 설계 변경시 반영함이 타당할 것으로 사료됨.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초 : 없음. - 변 경 : 없음. ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 없음. - 변 경 : 없음.					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - 천원 - 변 경 : 190,800 천원 - 증 감 : 증) 190,800 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 가로등 철거 및 이설
별첨서류	1. 실정보고 사본 1부

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	강남순환도시고속도로(8공구)구룡지하차도 전기공사
계약금액	235,400 천원	계약일	2015.02.13	시공사	㈜진영전력
공사기간	2015.02.13. ~ 2022.12. 31.	낙찰률	86.745%	설계자	㈜진영전력
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜동명기술공단 건축사사무소
공사규모	폭원 4-8차도 , 연장 1.17 KM			※ 작성자 : (☎)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	- 대모지하차도 가로등 철거 설치 설계반영 안됨.		- 대모지하차도 가로등 철거 설치 설계반영.
공 사 비	- 원		190,800 원	증)190,800원
적 용 요 율	-		기계약 – 86.745% (협의율)
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	86.745%
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 : 동기강 2018 –291호(2018.09.07.)
	관련규정
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	염곡동서지하차도 경량성토재 시공 정산
효 과	① 공기단축(-월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	■ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고 승인요청 – 동기강 2018-291호(2018.09.07.)