문서번호	클라우드센터운영과-1934
결재일자	2018.11.8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		클라우드센터운영과장	데이터센터소장
노형곤		박복수	11/08 김현규
협조
	인터넷통신과장		황기원

서초↔상암센터 프론트망 통신회선 변경계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

데 이 터 센 터

(클라우드센터운영과)

서초 데이터센터 ↔ 상암 클라우드센터 간

프론트오피스망 통신회선 변경계획

서초 데이터센터와 상암 클라우드센터 프론트오피스망 구간의 KT 전용회선을 서울시 자가망(u-서비스망)으로 변경하고자 함

1		운영현황

□ 구성현황

상암 클라우드센터

프론트 영역

서초 데이터센터

프론트 영역

KT회선

□ 통신회선 : KT 전용회선 2회선(30M급) **************

□ 주요 연계업무

서초센터 서초센터 : 서초 데이터센터		상암센터 상암센터 : 상암 클라우드센터
서울시홈페이지서버 서울시문자전송시스템 서울시메일시스템		응답소 웹서버 상수도 웹서버 역사박물관 웹서버

※ 세부 구성현황은 붙임. 참조

2		추진배경

□ 현재 서초↔상암센터 프론트망 연결된 KT회선을 서울시 자가망으로

프론트망 : 프론트오피스망(대민용 웹서비스를 위한 통신망)

전환하여 회선 임대비용 절감 및 ***************

□ 현재 수행 중인 ‘클라우드센터 인프라 구축(3단계) 사업’ 범위에

해당 과업이 포함되어 있어 회선 변경 및 장비 교체 추진

3		작업개요

□ 작 업 명 : 서초↔상암센터 간 프론트망 회선 변경 및 장비 교체

******************************************************

*********************

********************************************

*************************************************************************

**************************************

**********************************************************************************************

*************************************************************************************

4		세부작업계획

□ 작업방향

○ 사전 준비가 가능한 부분은 선 작업 실시로 본 작업시간 최소화

○ 서초센터와의 유기적인 협조 유지

***********************

***********************************************

************************************************

**********************************************

*******************************

□ 작업순서

작업구분	작업시간	작업내용	비 고
사전작업	기 작업 완료	************************* ******************************************************************************* ************************ ******************************* ************************* ***************************
본 작업	19:00~19:10	************************ *************************** **************************	****** ****** ******
사후작업	19:10~21:00	<서비스 확인> 클라우드센터 자체 VPN 연결기관 서비스 확인 서초 데이터센터와의 연계서비스 확인	**** **** *********

5		행정사항

□ 장비 교체 작업 공지 : 서울시 전 기관 및 부서

붙임 : 클라우드센터 프론트오피스 통신망 구성도 1부.