문서번호	교량안전과-19600
결재일자	2018.11.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
백운경		유제천	11/08 김종호
협조

"2018년 한강교량일상유지보수공사(연간단가)-2공구" 설계변경 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

교량안전과

“2018년 한간교량 일상유지보수공사(연간단가)-2공구”

설계변경 자문회의 결과 보고

본 공사와 관련 설계변경에 대한 설계사유의 타당성, 신규공종 및     물량변경의 적정성 등을 검토하고자 설계변경 자문회의를 개최하고 그   결과를 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 2018년 한강교량일상유지보수공사(연간단가)-2공구

□ 공사기간 : 2018.01.04 ~ 2018.12.31

□ 공사규모 : 한강상교량 9개소(동작~행주) 일상유지보수

□ 공 사 비 :3,064,618천원(도급 2,772,692천원, 관급 197,351천원, 이전 94,575천원)

□ 시공/감리 : 동보진흥건설(주)외 1개사/ 동성엔지니어링 외 2개사

Ⅱ		설계변경 자문회의 결과

□ 일  시 : 2018.11.05.(월) 17:00~18:00

□ 장  소 : 교량안전과 회의실

□ 위원구성

○ 위원장 : 특수교량팀장 정준용(내부위원 중 호선)

○ 위  원

· 내부(3) : 강북일반교량팀장, 6급 서성만, 6급 이회진

· 외부(1) : 1종교량 보수보강공사 건설사업관리단장 이재문

· 간   사 : 교량관리팀  6급 백운경

□ 자문결과 : 조건부 가결

○ 분야별 세부 자문회의 결과

1) 설계변경의 적정성

① 작업지시서(4차, 7차,9~13차)에 따른 물량증․감 및 신규공정 반영

⇒ 시설물별 점검결과,민원사항 등에 대한 보수물량 반영으로 적정

② 추가 공사비 예산조치 사항

⇒ 총사업비내에서 관급비, 이전비 활용 적정

③ 신규 및 초과물량에 대한 설계도서

⇒ 산출내역서, 시방서, 도면 적정

2) 세부 단가산출내역의 적정성

① 교각표지판, 계단논슬립 위험할증(교량) 15% 적용

⇒ 교량난간에 설치하는 교각표지판 및 진입계단 논슬립설치는 위험요소가 없는 것으로 판단되므로 할증 미반영이 타당함

② 신축이음부설치시 기존 신축이음자치 고재처리비 미적용

⇒ 고재 처리비 적용할 것(2,211.7Kg)

③ 교량상 잡초제거 일일노무 적용

⇒ 표준품셈 4-5-4, 1항 제초품 적용 타당

④ 신규비목 및 증가물량 단가는 협의단가 적용 적정함

⑤ 이외 단가 및 물량 적정성 등 적정하다고 판단됨

Ⅲ		조치계획

□ 자문결과를 반영하여 조건부 가결하고 설계변경 시행 코자 함

○ 추가 소요공사비는 기 확보된 한강일상유지보수공사 사업비 내에서 가용예산(관급비,이전비)을 활용하고,

○ 설계변경 자문회의 결과 절감액에 대하여는 한강교량의 돌발적 파손에 신속 대응 및 상시보수체계를 유지하고자 긴급출동 물량을 추가 확보하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경 자문회의 결과 1부.

2. 설계변경 제비율 검증 확인 1부.

3. 설계변경 자문회의 계약금액 조정 관리대장 1부.  끝.