문서번호	기반시설과-3173
결재일자	2018.11.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김완경		라철흠	11/08 전영주
협조

2018년 한강공원 수경시설(분수)

저수조 청소용역 설계변경·정산 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

서울특별시 한강사업본부

[ 기반시설과 ]

2018 한강공원 수경시설(분수)

저수조 청소용역 설계변경·정산 보고

2018 한강공원 수경시설 저수조 청소용역이 완료 됨에 따라 설계변경 사항이 발생 하였기에 보고드림

□ 용역목적

한강공원 내 분수 저수조 청소를 청소전문업체에 위탁하여 효율적, 체계적인 유지관리 및 철저한 수질관리로 이용시민에게 쾌적하고 깨끗한 공원이용 환경을 제공

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 2018 한강공원 수경시설(분수) 저수조 청소용역

❍ 용역기간 : 2018.04.23. ~ 2018.11.16.

❍ 도 급 자 : 삼조건설(주) 대표자 정 은 영

❍ 계약금액 : 39,182,100원

❍ 용역대상 : 3개소(난지거울분수, 뚝섬 음악분수, 뚝섬 벽천분수)

구 분	용 량	바닥면적(㎡)	저수조 수량
난지거울분수	Φ17m x 1.8m 114㎡ × 1.8m x 6개	226.9 684.0	7
뚝섬음악분수	Φ30m x 2m	706.5	1
뚝섬 벽천분수	154m × 2m × 0.6m	308.0	1
합 계		1,925.4	9

❍ 청소일정 : 30회(정기 27회, 수시 3회)

- 정기청소 : 가동기간 중 주1회(벽천분수는 월1회) 청소

- 수시청소 : 홍수침수 및 수질부적합 등 청소 필요시

□ 변경사유 및 내용

❍ 정기청소 27회 완료

❍ 수시청소 사유 미발생 및 3회 미시행으로 계약금액 변경사유 발생

❍ 계약변경 내역

구 분	변경 전	변경 후	증감액
계약금액	39,182,100	33,616,000	-5,566,100

□ 조치의견

❍ ‘18년 한강공원 분수 저수조 청소용역을 위와 같이 추진 완료하였기에 최종 설계변경(정산) 조치코자 하며, 계약 담당부서에 계약 변경토록 의뢰하고자 함.

첨부 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 보험가입 완납증명서 1부.  끝.