문서번호	방재시설부-14312
결재일자	2018.11.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
김달용		신용우	11/09 이임섭
협 조
	주무관			백종임

『광복교~안양교 도로확장공사』

공사지장수목 추가발생 실정보고 검토보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『광복교~안양교 도로확장공사』

공사지장수목 추가발생 실정보고 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『광복교~안양교 도로확장공사』의  안양교 경사로, 목감로 확장, 방음벽

설치에 지장되어, 관리기관 협의에 따른 지장수목 추가물량 발생에 대한

책임건설사업기술자의 실정보고 검토보고 임.

▸관련공문 : 광안건 제2018-469호(‘18.11.05)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 광복교~안양교 도로확장공사

○ 위    치 : 광명시 철산동 ~ 구로구 구로IC

○ 규    모 : 도로확장(L=1.11㎞), 광복교 보도설치, 안양교 재설치(4차로→6차로)

- 교목이식 147주, 반출제거 178주, 수목식재(왕벗나무 등 13종 16,328주)

○ 기    간 : 2016.04.01 ~ 2019.09.12

○ 도 급 비 : 433억원 (조경 347백만원)

○ 도 급 자 : ㈜KCC건설 대표 정몽열

Ⅱ		추진경위

○ ‘18.10.01 : 지장수목 추가협의 (도기본 → 광명시)

○ ‘18.10.17 : 추가협의 회신 (광명시 → 도기본)

○ ‘18.11.05 : 지장수목 추가분 실정보고 (감리단 → 도기본)

방음벽 설치구간 지장수목	목감로 확장구간 지장수목

Ⅲ		책임감리원 실정보고

○ 이식(제거) 물량                                     (단위:주)

구 분		계	방음벽 구간	목감로 확장	경사로 구간	비 고
교목	계	23	9	8	6
	이식	6	-	-	6
	제거	17	9	8	-
관목	계	817	97	720	-
	이식	-	-	-	-
	제거	817	97	720	-

○ 도급비 변경                                     (단위:천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
계		-	7,920	7,920
조경공사	소계	-	5,540	5,540
	이식․제거	-	5,005	5,005
	임목폐기물	-	535	535
제경비		-	2,380	2,380

○ 추가발생수목 처리계획

▸안양교 좌안 경사로, 방음벽 설치, 목감로 확장시 간섭되는 수목에

대한 광명시와의 협의결과에 따라 이식 및 설계변경 반영

▪수형불량 및 이식이 어려운 교목은 작업여건 등을 고려 반출제거

○ 책임감리원 검토의견

▸증가된 수목이식 및 제거수량

▪신규비목(수목이식 및 제거) : 강제협의율(85.081%)

▪기존비목(임목폐기물 처리)  : 계약단가 적용

Ⅳ		보고자 의견

○ 증가된 지장수목은 도급자의 책임 없는 사유로 발생한 사항으로

○ 책임감리원이 제출한 실정보고 검토의견이 적정하다고 판단되어 우선 승인

하고, 변경에 따른 공사비 증가분은 추후 설계변경시 반영하고자 합니다.

붙임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.

위치도 및 지장수목 현황

지장수목 위치도

방음벽 구간 지장수목	목감로 확장 구간 지장수목
안양천 경사로 구간 지장수목	안양천 경사로 지장수목 현황사진