문서번호	청계천박물관-2326
결재일자	2018.11.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	청계천박물관장	서울역사박물관장
강용운	사종민	11/09 송인호
협 조
	경영지원부장		代허혜경
	시설과장		박관현
	총무과장		허혜경

- 청계천박물관 인체인식형 키오스크 정보안내시스템 물품 구매설치 -

계약변경(기간연장) 계획

2018. 11.

청계천박물관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 청계천박물관 인체인식형 키오스크 정보안내시스템 물품 구매설치 -

계약변경(기간연장) 계획

전시관람 안내서비스 향상을 위해 추진중인『인체인식형 키오스크 정보안내

시스템』구매설치 관련 제품의 완성도를 높이고자 계약기간을 연장하고자 함.

□ 사업개요

○ 건    명 : 청계천박물관 인체인식형 키오스크 정보안내시스템 구매설치

○ 계약기간 : 2018. 9. 17.∼ 11. 15

○ 계 약 자 : 주식회사 브이플랩(대표자 : 오유미)

○ 계약금액 : 금39,600,000원(금삼천구백육십만원)

○ 계약방법 : 수의계약

○ 과업내용

- 인체인식형 안내 프로그램

- 다양한 이용자를 위한 가독성 높은 직관적 UI (User Interface)

- 박물관 종합 안내 (전체 시설물 이용, 전시, 교육 프로그램, 문화행사 등)

- [청계천박물관 홈페이지]와 [정보안내시스템] 콘텐츠 서버 연동을 통한 콘텐츠 업데이트

- 인체인식(얼굴 및 체형 등) 알고리즘이 적용된 디지털 포토존 기능

- 다국어 지원 (한국어, 영어, 중국어, 태국어, 일본어 등 총 5개국어 지원)

- 프로그램 구등을 위한 55inch touch monitor 및 PC 장치 (1set)

□ 추진경위

○ ‘18. 8. 6 : 인체인식형 키오스크 정보안내시스템 구매설치 계획수립

○ ‘18. 8.10 : 계약심사(계약심사과)

○ ‘18. 8.22 : 일상감사(안전감사담당관)

○ ‘18. 9.17 : 계약체결

○ ‘18. 9.17 ∼ 시행중

□ 변경내용

○ 계약기간 연장

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	2018.9.17.~2018.11.15	2018.9.17.~2018.12.15	증30일
계약금액	39,600,000	39,600,000	변동없음

※ 계약자와 계약금액 변경없이 기간연장에 합의

- 연장사유 : 1) 서울시 유무선 통합 홈페이지 개편 오픈(‘18. 11.19)

- 청계천박물관 키오스크 정보안내시스템 연동수행(API)

2) 완성도 제고를 위해 제품 성능개선 반영

- 고해상도 디스플레이 패널 변경 (55inch→65inch)

- 키오스크 함체 디자인 및 사이즈 변경

- 키오스크 UI구성 및 디자인 변경

○ 지체상금 : 미부과(연기사유 귀책소재 : 서울역사박물관)

- 계약업체의 책임 없이 발주기관의 요구에 의한 과업변경 등으로 인하여 제작납품 기간이 지연된 경우

〔관련근거 법령〕지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 [행정안전부 예규 제39호, 2018. 7. 9〕

제15장 물품계약 일반조건 / 제7절 계약이행의 지체와 계약의 해제 ․  해지 / 1. 지연배상금

다. 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 납품이 지체되었다고 인정할 때에는 그

해당일수를 “가”의 지체일수에 산입하지 아니한다.

3) 계약상대자의 책임 없이 납품이 지연된 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

다) 설계도서 승인 후 발주기관의 요구에 의한 설계변경으로 인하여 제작기간이 지연된 경우

□ 향후계획

○ 계약변경(기간연장) 의뢰(총무과) : ‘18.11.12

○ 키오스크 하우징 제작 및 콘텐츠 설계완료 : ‘18.11월중

○ 테스트 진행 및 보완, 제작완료 및 운영 : ‘18.12월중

붙임 : 1. 준공(납품)기한 연기의뢰서. 1부.

2. 합의각서 1부.

3, 납품기한 연장 신청 공문 1부.  끝.

준공(납품)기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 청계천박물관 인체인식형 키오스크 정보안내시스템 구매설치

나. 계약업체 : 주식회사 브이플랩(대표자 : 오유미)

다. 계약금액 : 금39,600,000원(금삼천구백육십만원)

라. 계약년월일 : 2018. 9. 17.

마. 착공년월일 : 2018. 9. 17.

바. 준공(납품)기한 : 2018. 11. 15.

2. 위 공사(용역, 물품)의 준공(납품)기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2018. 12. 15.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시(서울역사박물관)

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

1) 서울시 유무선 통합 홈페이지 개편 오픈(‘18. 11.19)에 따른 키오스크 정보안내시스템 연동(API)수행

2) 완성도 제고를 위한 제품 성능개선 반영

- 고해상도 디스플레이 패널 변경(55inch→65inch)

- 키오스크 함체 디자인 및 사이즈 변경 성능개선 내용 반영

- 키오스크 UI구성 및 디자인 변경

2018년  11월     일

담  당 : 청계천박물관   직급 : 지방행정주사    성명 : 강 용 운(서명 또는 인)

부서장 : 청계천박물관   직급 : 지방학예연구관  성명 : 사 종 민(서명 또는 인)

서울역사박물관 (분임)재무관 귀하

합   의   각   서

1. 계약건명 : 청계천박물관 인체인식형 키오스크 정보안내시스템 구매설치

2. 계약업체 : 주식회사 브이플랩(대표자 : 오유미)

3. 계약금액 : 금39,600,000원(금삼천구백육십만원)

4. 계약년월일 : 2018. 9. 17.

5. 계약기간 : 2018. 9. 17∼2018. 11. 15

6. 변경사항

계약금액	당 초	금39,600,000원(금삼천구백육십만원)
	변경후	금39,600,000원(금삼천구백육십만원)
	증․감액	증감없음
계약기간	당 초	2018.9.17.~2018.11.15
	변경후	2018.9.17.~2018.12.15

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2018.  11.    .

주관과 경유		계약상대자
소 속	청계천박물관	상 호 명 : 주식회사 브이플랩
직 급	행정 6급	대 표 자 : 오유미
성 명	강 용 운	주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 320-0 (삼평동)벤처포럼빌딩 112호

서울역사박물관 (분임)재무관 귀하