문서번호	도시철도토목부-13280
결재일자	2018.11.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
정삼기		호경수	11/12 代윤방식
협 조
	주무관			장대성

「서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사」

강재손료 실정보고(기간연장)에 대한 검토 보고

2018. 11.

도시기반시설본부

도시철도  토목부

서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사」

강재손료 실정보고(기간연장)에 대한 검토 보고

『서울 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사』와 관련 공사기간 연장에 따른 강재손료 반영 요청에 실정 보고가 있어 이에 대해 검토 보고 드림. 유신감921 제18-799호(‘18.11. 9) 「강재손료 실정보고」

1		공사개요

○ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사

○ 공사구간 : 송파구 방이동 올림픽공원 남4문 ~ 올림픽공원역

○ 공사규모

- 본     선 : L=1,408m (개착: 1,168m, 터널: 410m)

- 정  거  장 : L= 334m (1개소, 개착), 본선환기구 : 3개소

○ 공사기간 : 2010. 9.20. ~ 2018.12.31.

(9차공사 : 2018.01.18.～2018.12.31.)

○ 공 사 비 : 102,599백만원(9차공사 : 8,150.7백만원)

○ 시 공 자 : ㈜포스코 건설 대표 이영훈, 코오롱글로벌(주) 대표 윤창운

○ 감 리 자 : (주)유신 대표 성낙일

2		보고내용

□ 관련근거

○ ‘15.12.28. : 지하철 9호선 3단계 건설사업 공사기간 조정 검토보고(도시철도토목부-16559호)

○ ‘16.11.18. : 지하철 9호선 3단계 기본계획 변경승인 알림

- 국토교통부로부터 기본계획 사업기간 변경(당초 2015년→변경 2018년)

□ 검토내용

○ 가시설(강재) 손료 적용 근거

- 지하철 9호선 강재손료 적용기준 검토보고(서울시,2001.08.30.)

∙ 표준품셈상의 강재손료는 1년 이상이 70%로 되어 있으므로 강재의 잔존가치를 30%로 보아 상각비율을 70%로 적용

∙ 3단계 지하철공사의 강재손료 최대치를 70%로 수정 적용

(단, 복공판은 손료 최대치를 80% 적용)

- 2018 건설공사 표준품셈(2-2 가설시설물 및 손율, 2-2-1 손율)

사용 기간별 구분	3개월 (%)	6개월 (%)	1개년 (%)	1개년이상 (%)	비고
강 재 류	15	30	50	70

※ 손료 = 강재수량×(1+재료의 할증률)×신재단가×손율

○ 손료적용 대비표

구 분	최대손료 (사용일수)	‘15.12.30기준 기설치된 강재 사용 일수	비고
H말뚝	70% (884일)	설치: ‘10.10.29~, 사용일수: 1,889일	사용일수 초과
버팀보	70% (1,009일)	설치: ‘11.08.30~, 사용일수: 1,584일	사용일수 초과
주형보	70% (840일)	설치: ‘10.12.14~, 사용일수: 1,843일	사용일수 초과
복공판	80% (914일)	설치: ‘10.12.18~, 사용일수: 1,839일	사용일수 초과
강널말뚝	70% (840일)	설치: ‘11.09.28~, 사용일수: 1,555일	사용일수 초과

○ 단가산출 적용 검토

구분	수 량	단 가	비 고
적용 기준	[‘15.12.30기준] 적용수량= 기설치된수량 - 기해체된 수량	- H형강 : 추가손료 = 최대손료70% - 계약내역서 기존손료(변경수량 최대손료 적용 됨) - 복공판 : 추가손료 = 최대손료 80% -계약내역서 기존손료(변경수량 최대손료 적용 됨) ※ 기존단가+ES포함(1~4회)

※ 최대손료 적용사유: 상기 손료적용 대비표와 같이 최대손료 사용일수를 초과하였음.

※ 수량산출은 921공구 강재손료 반영 수량산출서 참조.

○ 추가요청 공사비 검토                             (단위:백만원, 부가세제외)

구 분	단위	수량	당초	변경	증감	비고
주형보(700 외)	ton	1,164	389	589	200	손료 차액반영
복공판	㎡	9,000	634	1,044	410	손료 차액반영
H형강(300 외)	ton	5,505	1,687	2,725	1,038	손료 차액반영
H형강(440 외)	ton	403	144	205	61	손료 차액반영
강관버팀보	ton	693	192	436	244	손료 차액반영
ㄷ형강	ton	245	59	122	63	손료 차액반영
SHEET-PILE	ton	632	329	351	22	손료 차액반영
L형강 외	식	1	504	683	179	손료 차액반영
직접공사비 소계			3,938	6,155	2,217
제경비	식		1,110	1,690	580
공사비 합계	식		5,048	7,845	2,797

※ 2015년 12월 30일 기준 당초 대비 최저 제경비율 적용

3		책임감리원 검토의견

○ 입찰안내서 제3장 계약조건(지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건) 20조(설계변경 등 9. 발주기관의 책임 있는 사유로 계약기간이 연장된 경우) 의거하여 공사기간 연장에 따른 직접공사비 추가비용 청구 목록에서 강재손료 금액을 반영함이 타당할 것으로 판단되며 추후 설계변경 및 계약금액 변경함이 타당함.

4		조치계획

○ 상기 감리단 의견과 같이 공사기간 연장에 따른 강재손료 추가비용에 대해 실정보고 한 사항으로서 연장된 계약기간 동안 설치되었던 강재에 한하여 손료반영 요청 사항인바,

○ 추후 우리부 설계변경자문위원회를 거쳐, 본부 설계변경자문위원회을 실시 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 1. 책임감리원 검토 의견서 1부.

2. 내역서등 관련문서 1식.  끝.