문서번호	공원운영과-14551
결재일자	2018.11.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	공원운영과장		서부공원녹지사업소장
유하현	류기혁	배효성		11/12 代배효성
협 조

「월드컵공원 단풍길 조성사업」실정보고

2018. 11.

서부공원녹지사업소

공원운영과 -

「월드컵공원 단풍길 조성사업」실정보고
		c

「월드컵공원 단풍길 조성사업」시행 중 설계내역과 현장 여건이 상이하거나 추가 보완이 필요한 사항이 발생되어 실정 보고드림.

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 사 업 명 : 월드컵공원 단풍길 조성사업

❍ 위    치 : 월드컵공원(하늘공원 일대)

❍ 사업기간 : 2018. 8. 16. ~ 12. 13.

❍ 도 급 액 : **********

❍ 도 급 자 : 주식회사 이젠리버텍 (대표 조보연)

❍ 사업내용 : 왕벚나무 등 4종 316주, 조경석 쌓기, 자동급수시스템 설치 등

Ⅱ		실정보고 사항

구 분	실 정 보 고 내 용	비 고
식재공	▶ 하늘공원길 식재 수종 변경 및 추가 식재 필요 ○ 수종변경: 회화나무(B12) 8주 → 이팝나무 8주 : 녹병이 심한 회화나무를 제거한 구간으로 이팝나무로 수종갱신 ○ 추가식재: 녹병 피해목 제거지 53개소(이팝나무 식재) ▶ 식재 위치 변경(조정) 및 결주 구간 추가 식재 ○ 식재 부적지 위치 조정 및 식재 선형 확보 등을 위해 누락 지역 보완 식재 등이 필요 ▶ 수목 이식 ○ 하늘공원 왕벚나무(B12) 7주 → 0주 : 하늘공원 대기실 신축 부지 위치 변경에 따라 이식 불필요

구 분	실 정 보 고 내 용	비 고
시설물공	▶ 자동급수 시스템 ○ 점적단추 옥타8(1주/1개)468개소 → 0개소 : 금년 관수시스템 운영 결과, 옥타8 보다는 자체적으로 개발한 급수방법(연질관 덮개 씌움)이 더 효율적임(추후 자체시행) ○ 설계상 관수시설 적정성 검토 : 식재계획․급수방법 변경 등에 따른 적정성 검토 필요

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 시설관리공단(공사감독) 및 시공사에 통보하여 설계 반영 등 검토 요청

- 시설관리공단 및 시공사 검토 후 계약변경 등 시행(예산범위내)

❍ 추가 소요 예산은 사업비 집행잔액**********을 활용

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	집행액 (원인행위액)	잔 액
하늘공원진입로단풍길조성사업	300,000	264,727	35,273

끝.