문서번호	교량안전과-19738
결재일자	2018.11.12.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
이회진		이홍재	11/12 김종호
협조

- 2018년 도림천고가 보수공사 -

설계변경 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

안전총괄본부

교량안전과

- 2018년 도림천고가 보수공사 -

설계변경 자문회의 결과 보고

2018년 도림천고가 보수공사 설계변경 자문회의 결과 보고 임

Ⅰ		근 거

□『2018년 도림천고가 보수공사』실정보고에 따른 조치계획

(교량안전과-15181, ‘18.8.29)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 2018년 도림천고가 보수공사

□ 공사기간 : 2018. 5. 21. ~ 2019. 1. 15

□ 총공사비 : ***********

○ ********************************************

□ 공사내용

○ 교면방수 및 포장 99.64a, 콘크리트 단면보수 247㎡,

○ 콘크리트 균열보수 60m, 연석철거 및 재설치 341m 등

□ 계약상대자 : ㈜송림건설

Ⅲ		설계변경 자문회의 결과

□ 자문회의 개요

○ 일 시 : 2018.11.02.(금) 14:00

○ 장 소 : 교량안전과 회의실

○ 위원구성

- 위원장 : **********************

- 위  원

· 내부(3) : ************************

· 외부(1) : ************************

- 간 사 : ************

□ 자문결과 : 조건부 가결

□ 주요 자문내용

○ 콘크리트 단면보수에 필요한 장비 반영

- 설계도면, 시방서에는 단면보수에 필요한 공종별 시공방법을 제시하고              있으나 당해 현장은 고소작업으로 공사위치에 접근할 수 있는 비계나

장비(고소작업차 등)가 필요한 실정이므로 도면과 시방서를 보완하여              반영 필요

○ 미끄럼방지포장재 관급구매

- 조달사업에 관한 법률 제5조의2, 동법 시행령 제9조의3에 의거 수요              기관의 장은  조달물품으로 등록된 제품(제3자단가계약, 다수공급자              계약 등)은 조달청장에게 계약 체결을 요청하여 관급으로 구매 필요

- 당해 공사에 소요되는 미끄럼방지포장재를 내역에 사급으로 반영 하였

으나 관급으로 구매하는 것이 타당

○ 신규비목 단가산출

- 당해 공사에 적용된 신규비목(계약상대자의 책임 없는 사유 포함)은             계약상대자가 설계변경 당시 산정한 단가에 낙찰률(87.645%)를              적용하기로 협의함.

○ 기타 교통신호수, 교통정리원 투입인원은 일용인부 출력내역 등

근거자료 제시 필요

○ 자문결과 공사비 변경 내역

구 분	실정보고 내역	자문결과 반영내역	증·감	비 고
총공사비	*************	*************	**************
도 급 비	*************	*************	**************
관 급 비	***********	***********	**************
이 전 비 (폐기물처리 등)	**********	**********	**************

※시공물량, 폐기물, 관급자재 및 제경비 등 최종 정산 결과에 따라 증.감 될 수 있음

Ⅳ		조 치 계 획

□ 자문회의 결과 통보(사공사, 감리) 및 설계변경 추진

Ⅴ		향 후 계 획

□ ‘18. 11. 23  : 예비준공검사

□ ‘18. 11. 30  : 설계변경 및 변경계약

□ ‘18. 12. 31  : 공사 준공

붙임  1. 설계변경 자문회의 결과 1부.

2. 설계변경 제비율 검증 확인 1부.

3. 설계변경 자문회의 계약금액 조정 관리대장 1부. 끝.

4. 설계변경 자문회의 결과 반영 내역서 1부. 끝.