문서번호	주거환경개선과-12025
결재일자	2018.11.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	주거환경행정팀장	주거환경개선과장
정윤진	代이효신	11/12 남정현

양천구 신월1동(곰달래꿈마을) 관리형 주거환경개선사업

정비기반시설 조경공사 설계변경 계획

2018.11.

도시재생본부

(주거환경개선과)

양천구 신월1동(곰달래꿈마을) 관리형 주거환경개선사업

정비기반시설 조경공사 설계변경 계획

양천구 신월1동 곰달래꿈마을 정비기반시설 조경공사 시행 중 현장 여건 변화에 따른 사업물량 증가로 자치구로부터 설계변경 요청이 있어 이를 검토하고자 함

※ 낙찰차액 사용 요청액 : ********, 부서 : 양천구(균형개발과)

1		사 업 개 요

○ 대상지역 : 양천구 신월1동 232번지 일대 (45,754㎡)

○ 사업기간 : `18.07. ~ `18.12 (착공일로부터 160일)

○ 재배정액 : ****************************

연번	공정	계약물량 (`18.7)	변경물량 (금회)	증감내역	비고
1	화단조성	***	***	******	*******
2	담장도색	***	*	******	*******
3	목재담장	****	****	*******	***********
4	어린이보호구역 재도색	***	*	******	***********
5	반사경 설치	***	***	****	*

○ 조경공사 변경내용

○ 조경 공사비 개요

연번	구분	배정액 (A)	공사비(천원)			증감액	비고
			계약금액 (B)	낙찰차액 (A-B)	최종 공사비
1	도급비	*******	*******	******	*******	********	************
2	관급자재비	******	******	*	******	*********	*************
총 계		*******	*******	******	*******	*********	*********

(단위 : 천원)

2		추 진 경 위

○ `17.03.23         : 정비구역 지정 및 지형도면 고시 (서울시고시 제2017-106호)

○ `17.07 ~ 12.08    : 정비기반시설 기본 및 실시설계

○ `17.12.07         : 설계 중간보고

○ `18.04.26         : 공사비 예산재배정 (시 → 구)

○ `18.06.21         : 공사비 예산재배정 추가 요청 (구 → 시)

○ `18.11.05         : 조경공사 설계변경 내용 보고 (구 → 시)

3		검 토 내 용

□ 사업 변경내용

○ ***********************************************

○ *********************

- **********************************

- **************************

물량 변경도	목재담장 현황사진

○ *********************

□ 검토결과

*****************************************

*****************************************************

*************************************************

********************************************

*********************

4		향 후 계 획

○ `18.11.  : 공사 추가발주 및 시행

○ `18.12.  : 정비기반시설 공사준공

붙임 : 설계변경 요청(자치구) 1부.  끝.