문서번호	서울특별시차량정비센터-13461
결재일자	2018.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	소장
임근식		이광천	11/12 신용휴
협 조

판금반 자동문 제작구매 납기 지연 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  11.

서울특별시 차량정비센터

판금반 자동문 제작구매 납기 지연 보고

판금반 야외 작업장에 근무환경개선을 위해 설치 중인 자동문이 제작설치 기간을 초과하였는데도 설치작업이 원활히 진행되지 않아 절차에 따라 납기 지연을 통보하고 조속한 설치완료를 독려코자합니다

Ⅰ		계약 현황

❍ 건명 : 판금반 자동문 제작구매

❍ 계약금액 : 금14,250,000원

❍ 계약기간 : 2018. 10. 19 ~ 2018. 11. 8

❍ 계약업체 : ㈜케이아이디 (대표 박준영)

Ⅱ		납기지연 내용

❍ 현재상태 : 자동문이 현재 설치 위치에 자리는 잡았으나 구동을 위한 전기설비 미연결 및 마감작업 미완성

❍ 납기지연 사유 : 제작 지연 및 적극적 해결의지 부족

❍ 현장사진

현장 전체 사진	세부 사진

Ⅲ		조치 계획

❍ 기 조달청(g2b)을 통해 접수된 검사검수요청서는 반려하고

❍ 조속히 납품완료 할수 있도록 독려

❍ 납품완료 후 지체상금 0.08%/일 부과.  끝.