문서번호	도시철도토목부-13282
결재일자	2018.11.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조태현		최진규	11/12 정대현
협 조
	주무관			정중규

「지하철 919공구 건설공사 」

가로등 설치 관련 현장 실정보고 검토

2018. 11.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『지하철 919공구 건설공사』

가로등 설치 관련 현장 실정보고 검토

『서울지하철 9호선 3단계 건설공사』추진 중 책임건설사업관리기술자로부터 가로등 설치 관련 현장 실정보고가 있어 아래와 같이 검토함.

- 관련근거 : 가로등 설치 반영 실정보고【수성(919) 2018-702호(`18.11.10.)】

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

❍ 위     치 : 서울특별시 송파구 삼전동 ~ 송파구 석촌동

❍ 규     모 : 총 연장 1,560m

〔본선개착 96m, 터널 1,128m, 정거장(2개소) 336m〕

❍ 계약금액 및 공사기간

구 분	계약 금액(원)	공사 기간	비고
총체	211,191,000,000	2009.12.31. ~ 2018.12.31.
11차(금회)	18,921,000,000	2018.02.09. ~ 2018.12.31.

Ⅱ		추 진 경 위

❍ `09.12.31. : 공사 착공

❍ `11.06.15. : 실시설계 완료

가로등 이설 : 29본

❍ `18.04.13. : 가로등 복구 계획서 제출 요청(송파구청)

지중배관․배선 교체, LED등으로 교체, 내구년한이 지난 가로등주(분전함) 개량, 필요시 가로등 추가 및 보행등 설치

좋은빛 심의필한 후 설치

❍ `18.05.31. : 가로등 좋은빛 심의 요청(도시철도토목부)

※ `18.06.07 심의결과 원안 동의(도시빛정책과)

❍ `18.11.08. : 가로등 원상복구에 대한 요청사항 알림(송파구청)

가로등 추가 요청 : 총 42본

Ⅲ		책임건설사업관리자 검토내용

❍ 실정보고 사유

- 송파구청에서 가로등 원상복구 시 LED등, 가로등주 개량 요청

※ 관련규정 : 지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건 제19조 제2항 제2호

서울광원 LED조명 보급 활성화 계획(녹색에너지과-3764, ‘13.2.26)

❍ 가로등 설치 변경 현황

위치	당 초	변 경
설치수량	32 본	42 본
931 S1 환기구
	가로등주 2본	가로등주 2본
932 정거장
	가로등주 16본	등주 22본(통합 7, 가로 15)
933 정거장
	가로등주 14본	등주 18본(통합 6, 가로 12)

기존	최종
1등용	신호등통합주			가로등주
	1등용 (LED 100W)	2등용 (LED 100W)	4등용 (LED 200W)	1등용 (LED 100W)	2등용 (LED 100W)	4등용 (LED 200W)

※ 신설 가로등 : 송파구청 협의 및 좋은빛 심의 완료

❍ 가로등 종류별 변경 현황

구 분	당초 (1등용)	변 경
		신호등통합주			가로등주			계
		1등용	2등용	4등용	1등용	2등용	4등용
931S1환기구	2				2			2
932정거장	16	2	2	3	14		1	22
933정거장	14		2	4		12		18
계	32	2	4	7	16	12	1	42

❍ 물량 및 공사비 변경 현황

(단위 : 백만원)

구 분		당 초		변 경		증 감		비 고
		수량	금액	수량	금액	수량	금액
직접공사비	재질변경	32	44	32	100	-	56	램프,등주 (재료비 반영)
	신규설치			10	74	10	74
	계	32	44	42	174	10	130
제경비			-		21		21
계			44		195		151

❍ 책임건설사업관리기술자 보고내용

- 건설공사 추진중  송파구청 협의 및 『좋은 빛 심의위원회』결과에 따라 가로등 설치비를 검토한바, 가로등 설치를 위한 물량 산출 및 단가산출함이 타당하다고 사료되며, 추후 설계변경시 조정된 계약 금액을 반영 하고자 함.

Ⅳ		검토의견(조치계획)

❍ 상기 내용과 같이 가로등 설치 변경에 대해 책임건설사업관리기술자 보고내용과 같이 승인하고,

❍ 향후 본부 설계변경소위원회 심의를 거쳐 설계변경 조치하고, 총사업비 변경 시 반영코자 함.

붙임 : 실정보고 1부.  끝.