투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전[전기공사 설계변경(총차1회-1차1회) 및 통신공사(1차) 준공기한 연기 승인 알림]

1. 업무지시현장:중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사(장기-1차) 주식회사 천일, 중

랑물재생센터 총인처리시설 통신공사(장기-차) 주식회사 천일, 중랑물

재생센터 총인처리시설 전기공사(장기-1차) (주)진전기엔지니어링, 중

랑물재생센터 총인처리시설 통신공사(장기-차) (주)진전기엔지니어링

2. 작 성 일 자 : 2018-11-12 15:11:48

3. 지 시 내 용

가. 중랑감 제18-287호(2018.11.09.) 및 중랑감 제18-289호(2018.11.09.)와 관련입니다.

나. 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사 사업진행 중 발생한 설계변경 사항에 대한 검토보고사항과 중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사(1차)에 대한 준공기한 연기 검토보고 사항에 대하여 승인하오니 조속히 변경 재계약이 될 수 있도록 조치하여 주시길 바라며,

다. 향후 공사진행과 관련하여 아래 사항에 대하여 유념하여 사업진행에 만전을 기하여 주시길 바랍니다.

1) 공사진행 관련 유의사항

- 전기 1차공사 준공검사 진행 준비 철저(준공관련 계약업무 마감기한 : `19.12.18)

- 통신 1차공사 공기연장에 따른 건설정보관리시스템에 공사예정표를 재수립하여 공정관리 철저(변경 공사예정표 제출 바람-감리단 승인)

- 전기 및 통신공사 2차 발주물량 내역서 제출(`19.12.20일 까지)

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							김두환			열빛총괄과장					11/12 유병기
협조자
시행			설비부-15421									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8604						/전송			02-3708-8659					/	buckgolje@seoul.go.kr												/	부분공개(5)