투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 시행(2018년 중앙버스차로 흐름개선 교통신호기 공사)

1. 기전과-10509(2018. 11. 12.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행 중인「2018년 중앙버스차로 흐름개선 교통신호기 공사」의 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공사명: 2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사

나. 공사기간: 2018. 3. 22.~2018. 11. 24.

다. 도급자: 새한전설(주)  이수정

라. 계약금액: 금17,146,800원

마. 설계변경 내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
도급비	17,146,800	22,840,400	증) 5,693,600

바. 설계변경 사유: 용산구청에서 보도상 통행 불편에 따른 교통신호기 이설 요청

사. 예산과목: 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스 이용제고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 계약금액 조정 검증확인서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	정영술		기전과장	11/12 서수일
협조자
시행	기전과-10532	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8403	/전송	02-300-8410	/		/	대시민공개