문서번호	도로보수과-6364
결재일자	2018.11.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
이석연		송광석	11/12 김유찬
협조

『송파대로 교차로 소통개선사업 건설폐기물 처리용역』

설계 변경(최종) 및 준공 검토 보고

2018. 11.

동부도로사업소

(도로보수과)

『송파대로 교차로 소통개선사업 건설폐기물처리용역』

설계 변경(최종) 및 준공 검토 보고

Ⅰ		용역현황

○ 용 역 명 : 송파대로 교차로 소통개선사업 건설폐기물 처리용역

○ 용역기간 : 2018. 8. 13. ~ 2018. 11. 15.

○ 도 급 비 : 6,700,000원

○ 용역개요

- 폐기물 운반 77㎥, 폐기물 처리 180ton

○ 도급자 : ㈜대성개발산업 외 1개사 대표 송영헌 외 1인

Ⅱ		설계변경 사유

○ 시 경계 조형물(해치상) 철거 계획【도로보수과-4988(2018.9.12.)】

- 시 경계 조형물 철거에 따른 폐기물량 반영

○ 송파대로 교차로 소통개선사업 현안사항 보고【도로보수과-5072(2018.9.14.)】

- 송파대로 중앙버스정류장 횡단보도 부적정 턱낮춤 구간 추가정비에 따른 폐기물량 반영

○ 송파대로 교차로 소통개선사업 현안사항 보고Ⅱ【도로보수과-5501(2018.10.5.)】

- 깨기구간 포장두께 증가에 따른 폐기물량 반영

Ⅲ		설계변경 증․감 현황

○ 용역비 증․감 현황

구 분	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
도 급 비	6,700,000	16,400,000	증) 9,700,000

○ 주요 물량 증․감 내역

공 종		단 위	수 량		증 ․ 감
			당 초	변 경
폐콘크리트	운반	㎥	11	60.4	증) 49.4
	처리	톤	24	138.8	증) 114.8
폐아스콘	운반	㎥	66	133.1	증) 67.1
	처리	톤	156	312.7	증) 156.7

○ 예산과목별 증감 내역

예 산 과 목	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
계	6,700,000	16,400,000	증) 9,700,000
교통운영, 도시교통체계 및 소통개선, 교통개선 분담금 사업, 송파대로 교차로 소통개선사업, 시설비	6,700,000	1,280,0000	증) 6,100,000
도로관리, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 도로부속시설물 일상 유지관리, 시설비	-	3,600,000	증) 3,600,000

Ⅳ		준공 시행

○ 준공내용 : 설계변경(최종) 대한 폐기물량 반영분 정산처리

○ 정산금액

계약액(예정)	기정산액	금회 정산액	누계기성액	잔액	비고
￦16,400,000	-	￦16,400,000	￦16,400,000	-	100%

Ⅴ		조치계획

○ 붙임 설계변경 도서 및 정산서에 의거 설계변경 및 정산 시행

붙 임  1. 설계변경(최종) 설계도서 1부.

2. 준공(정산) 설계도서 1부.

3. 관련방침서 3부.  끝.