문서번호	기술심사담당관-17772
결재일자	2018.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제246호

				시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관		행정2부시장
윤갑진	류용열	김홍길		11/12 진희선
협 조
	기술관리팀장		이상석
	건축심사팀장		도태환
	토목심사팀장		조임남

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(10월)

2018. 11.

기술심사담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	외부전문가 주관 점검실시
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(10월)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는「외부전문가 기동점검단」의 ’18년 10월 중 활동결과에 대하여 보고 드림.

□ 점검개요

점검일자	’18. 10. 2.(화)	’18. 10. 16.(화)	’18. 10. 23.(화)	’18. 10. 30.(화)
공 사 명	신림~봉천 터널 도로건설공사(1공구)	동부간선도로 확장공사(2공구)	강남구 직업재활센터 증축공사	신림선 도시철도 민간투자사업(3공구)
사업부서	도시기반시설본부 (토목부)	도시기반시설본부 (토목부)	강 남 구 (건 축 과)	도시기반시설본부 (도시철도사업부)
공사기간 (공정률)	’10.10. ~ ’20.12. (8.5%)	’08.12. ~ ’19.12. (57%)	’18. 2. ~ ’19. 7. (26.4%)	’17. 2. ~ ’22. 2. (15%)
점 검 자	· 건 화 송 훈 · 영진엔지니어링 김상석 · 아남이엔지 방성운 (내부 : 기술관리팀 2)	· 제일엔지니어링 오해진 · 대신이엔지 하상우 · 한국건설방재연구원 송준민 (내부 : 토목심사팀 3)	· 성우구조안전기술 음성우 · ㈜한국안전이엔지 권회구 · 포스코 A&C 최범종 (내부 : 건축심사팀 3)	· 한맥기술 박윤규 · 바우컨설탄트 김태흥 · SC안전지도사사무소 김승환 (내부 : 기술관리팀 3)

□ 중점 점검사항

❍ 현장대리인, 책임감리원 등 근무실태

- One-PMIS에 작업일보 작성 및 현장내 장비, 인력 투입현황 관리 여부

- 현장반입 건설기계임대차 계약서 작성, 대여대금 지급보증서 교부 여부 확인

- 현장대리인 및 참여기술자(감리원) 현장근무 여부 확인 등

❍ 토공 및 가시설 설치상태 등 안전관리 실태

- 동바리, 비계 설치 및 유지관리 실태 점검

- 터널, 개착구간 등의 가시설 시공 및 유지관리 실태 점검

❍ 구조물에 대한 품질․공정관리 등 시공관리

- 시공 상세도 등 설계도면 작성상태 및 시공계획 수립 여부

- 구조물 시공 및 품질관리 상태 점검

□ 점검결과

❍ 총 지적사항

공 사 명	계	안전관리	품질관리	기 타
계	47	30	12	5
신림~봉천 터널 도로건설공사(1공구)	11	10	0	1
동부간선도로 확장공사(2공구)	13	8	5	0
강남구 직업재활센터 증축공사	15	5	7	3
신림선 도시철도 민간투자사업(3공구)	8	7	0	1

□ 분야별 주요 지적사항

안전관리 분야

❍ 사보강 구간 H-파일과 띠장 간격재 하부 이격부분 조치 필요 [신림~봉천 터널 도로건설공사(1공구)]

⇒ 간격재 하부 이격부분에 대하여 용접 등 조치할 것

❍ 우각부 강재 토류판 앵글과 H-파일간 용접상태 불량 [신림~봉천 터널 도로
건설공사(1공구)]

⇒ 토류판 앵글을 용접, 볼트이음 등으로 H-파일에 확실히 지지시킬 것

❍ 띠장 지지를 위한 브라켓(L형강) 일부 누락 [동부간선도로 확장공사(2공구)]

⇒ 안전시공을 위해 누락 개소에 대한 추가 설치 요망

❍ 111정거장 버팀보 설치 불량구간 축력 전달 및 계측 이상여부 확인 조치
필요 [신림선 도시철도 민간투자사업(3공구)]

⇒ 축력 전달 및 계측 상태 등을 확인하여 조치 방안을 강구할 것

❍ 중간파일 중 연직도 불량구간 등 좌굴 안전성 확보를 위한 보강 브레이싱
설치 필요 [신림선 도시철도 민간투자사업(3공구)]

⇒ 중간파일 좌굴 안전성 확보를 위한 추가 브레이싱을 설치할 것

❍ 4층 코너 및 계단실 주위 안전 난간대 미설치 등 안전관리 미흡 [강남구
직업재활센터 증축공사]

⇒ 강관 비계 등 고정식 설치로 안전난간대를 설치하여 추락 방지 요함

❍ 5층 하부의 낙하물 방지망 미설치(4층 데크 플레이트 half slab 조립 작업자 위험) [강남구 직업재활센터 증축공사]

⇒ 낙하물 방지망 설치 요함

품질관리 분야

❍ BOX구조물 신축이음재 누출부 정리 필요 [동부간선도로 확장공사(2공구)]

⇒ 잔여물 정리 및 실링재 채움 요망

❍ 기둥 중심이 어긋난 보 위의 스티프너 설치 누락 [강남구 직업재활센터 증축공사]  ⇒ 스티프너 설치 보강 요망

❍ 지하차도 Box구조물 노면 배수로 바닥 정리 필요 [동부간선도로 확장공사(2공구)]

⇒ 바닥 콘크리트 잔여물 정리 및 영구적인 배수구 관리 필요

❍ 지하차도 중간파일 마감부 지하수 변동에 따른 누수 확인 필요 [동부간선도로 확장공사(2공구)]

⇒ 양수압에 의한 누수가 없을시 영구적으로 포장 마감 요망

기   타

❍ 폐기물 관리상태 미흡 [강남구 직업재활센터 증축공사]

⇒ 현장 내 콘크리트 잔재 등 건설폐기물 및 기타 쓰레기 신속 정리

□ 조치사항

❍ 지적사항은 점검 당일 시공업체, 공사감독관에 전달하여 즉시 시정 요구

❍ 발주기관(부서)에 지적사항 시정 및 현장관리 철저토록 공문 통보

붙  임 : 기동점검 주요 지적사례(10월).  끝.