문서번호	도시철도토목부-13326
결재일자	2018.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
노권호		윤방식	11/13 정대현
협조
	주무관		엄상민

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사』

공기연장에 따른 교통정리원 추가금액 실정보고에 대한 검토보고

2018. 11.

도시철도토목부

「서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사」

공기연장에 따른  교통정리원 추가금액 실정보고에 대한 검토보고

「서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사」와 관련 공기연장에 따른   교통정리원 추가금액 실정보고에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		사업개요

❍ 공 사 명: 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

❍ 위    치: 서울시 송파구 석촌역~올림픽공원 남4문사거리

❍ 규    모: 총연장 1,390.5m(정거장 1개소, 본선환기구 4개소)

❍ 공사기간: 2009.12.31. ~ 2018.12.31.

❍ 도 급 비: **********

❍ 시 공 사: 롯데건설(주)외 1개사

❍ 감 리 사: 벽산엔지니어링(주)외 3개사

Ⅱ		추진경위

❍ ‘16.11.18. : 기본계획 변경승인 알림(본부 ⇨ 감리단)

- 당초 : 2009.12.31. ~ 2015.12.29

- 변경 : 2009.12.31. ~ 2018. 3.31 (증 823일, 27개월)

Ⅲ		보고내용

□ 공기연장에 따른 교통정리원 추가금액 변경

❍ 교통정리원 산출 내용

구 분	당 초	변 경	사 유	비 고
교통정리원	************ ********* *********	************ ********* *********	****	******

□ 공사비 증감 내용                                    (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
교통정리원	*********	********	**********
제 경 비	********	*********	***********
계	********	*********	***********

□ 관련규정

❍ 입찰안내서 제3장 계약조건(지하철 9호선 3단계 일괄공사계약특수조건) 제19조 제2항 제9호

제19조(설계변경 등)

② 계약금액의 조정이 가능한 설계변경은 발주기관에 책임 있는 사유 또는 천재․지변 등 불가항력의 사유로 인한 경우에 한하며, 일반조건 제21조제3항의 각호를 다음과 같이 구체적으로 규정한다.

9. 발주기관의 책임 있는 사유로 계약기간이 연장된 경우

□ 책임감리원 검토의견

❍ 계약기간 변경에 따라 교통정리원 투입기간 연장으로 추가금액 반영이 필요한 실정이고, 당초 단가산출서를 준용하여 산출하였으며, 계약금액 반영 필요.

Ⅳ		조치의견

❍ 교통정리원 추가금액은 공기연장에 따른 사항을 반영한 것으로 책임감리원 의견과 같이 승인하고,

❍ 추가금액은 향후 설계변경자문 소위원회 심의를 거쳐 설계변경 조치 및 총사업비 변경 시 반영코자 함.

붙임  책임감리원 실정보고 1부.  끝.