문서번호	도시철도토목부-13335
결재일자	2018.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조태현		최진규	11/13 정대현
협 조
	주무관			정중규

「지하철 919공구 건설공사 」

차도복구 관련 현장 실정보고 검토

2018. 11.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『지하철 919공구 건설공사』

차도복구 관련 현장 실정보고 검토

『서울지하철 9호선 3단계 건설공사』추진 중 책임건설사업관리기술자로부터 차도복구 관련 현장 실정보고가 있어 아래와 같이 검토함.

- 관련근거 : 차도복구 재질변경 및 무단횡단방지시설 설치반영 실정보고【수성(919) 2018-694호(`18.11.06.)】

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

❍ 위     치 : 서울특별시 송파구 삼전동 ~ 송파구 석촌동

❍ 규     모 : 총 연장 1,560m

〔본선개착 96m, 터널 1,128m, 정거장(2개소) 336m〕

❍ 계약금액 및 공사기간

구 분	계약 금액(원)	공사 기간	비고
총체	211,191,000,000	2009.12.31. ~ 2018.12.31.
11차(금회)	18,921,000,000	2018.02.09. ~ 2018.12.31.

Ⅱ		추 진 경 위

❍ `09.12.31. : 공사 착공

❍ `11.06.15. : 실시설계 완료

실시설계 내용 → 차도 : 표층(WC-2) #78,  무단횡단 방지시설 : 무

❍ `14.06.10. : 아스팔트 콘크리트 적용기준 개선방안 통보

(서울특별시 도로관리과)

❍ `18.05.16. : 지하철 9호선 3단계 공사구간 포장도로 업무 협의

(동부도로사업소 도로보수과)

도로포장 일반구간 : WC-3(PG64-22, 1등급, 인장강도비 0.8이상)

정지선구간 : 개질WC-5(PG76-22, 1등급, 인장강도비 0.8이상)

❍ `18.08.10. : 최종 교통처리계획 통보(서울특별시지방경찰청)

919공구 : 차로재구획(무단횡단방지시설 추가)

❍ `18.09.28. : 백제고분로 지하철 공사구간내 광역상수도 굴착공사 처리계획 알림 및 협조요청(동부도로사업소)

석촌역(933정거장) 주변 광역상수도공사 예정구간 재생아스콘 시공 요청

❍ `18.10.16. : 지하철9호선 개통대비 포장도로 정비 및 관리 협조 요청(서울특별시 도로관리과)

삼전사거리~배명사거리 : 추가 포장 요청

❍ `18.10.26 : 지하철9호선 포장도로 정비 및 관리 요청에 대한 회신

(도시철도토목부)

삼전사거리~배명사거리 : 포장 시행 예정

Ⅲ		책임건설사업관리기술자 검토내용

❍ 변경 사유

- 실시설계 완료 이후 포장도로 표층에 대한 아스팔트 콘크리트 적용기준 변경 및 유관기관(동부도로사업소)의 포장도로 표층 재질변경 요청

- 서울지방경찰청 교통규제심의 결과 무단횡단방지시설 설치 요구

- 추가 도로포장 요청

※ 관련규정 : 지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건 제19조 제2항 제2호 내지 제3호

9 3 1 S 1 환 기 구
9 3 2 정 거 장
9 3 3 정 거 장

❍ 도로복구 현황도

❍ 차도포장 변경 현황

구분		당초	변경		비고
			일반구간	교차로 정지선구간
아스팔트 콘크리트 (표층)	아스팔트 혼합물 입도	WC-2	WC-3	개질WC-5	재질변경
	아스팔트 바인더 공용성 등급(PG)	PG64-22 이상	PG64-22 이상	PG76-22 이상
	인장강도비	규정없음	0.8이상	0.8이상
무단횡단 방지시설		-	Ø180×2,000×900mm		신규설치

※ 무단횡단방지시설 설치 제외 구간 : 933정거장 시점부(한국수자원공사 시행 예정)

❍ 물량 및 공사비 변경 현황

(단위 : 백만원)

구 분		단위	당 초		변 경		증·감		비 고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
931S1 환기구	아스팔트 콘크리트 표층공	a	8.70	6	8.70	9	-	3	재질변경 (wc-3)
		a	-	-	74.15	95	74.15	95	추가시공 (wc-3)
	차선도색	m	-	-	360	2	360	2	추가시공
	무단횡단 방지시설	m	-	-	115	9	115	9	추가시공
932 정거장	아스팔트 콘크리트 표층공	a	64.13	47	64.13	69	-	22	재질변경 (wc-3)
		a	14.67	11	14.67	19	-	8	재질변경 (wc-5)
	무단횡단 방지시설	m	-	-	158	12	158	12	추가시공
933 정거장	아스팔트 콘크리트 표층공	a	41.78	31	41.78	45	-	14	재질변경 (wc-3)
		a	54.45	40	54.45	41	-	1	재질변경 (재생)
직접공사비		a		135		301		166
제경비		식		45		40		-5
총공사비		식		180		341		161

※ 단가적용

- 재질변경 : 계약당시 자재단가와 신규자재 단가 차액 적용

- 추가시공 : 설계변경시점 협의단가 적용

❍ 책임건설사업관리기술자 보고내용

- 건설공사 추진중 도로복구 표층 포장 공사전 해당기관과의 협의(동부도로사업소, 서울지방경찰청 교통규제심의) 및 관련 근거로 시공하여 개통전 도로복구를 시행하고자 산출된 사항으로 타당하다고 사료되며, 추후 설계변경시 조정된 계약금액을 반영 하고자 함.

Ⅳ		검토의견(조치계획)

❍ 상기 내용과 같이 포장도로 표층 재질변경 및 무단횡단방지시설 설치 및 추가 도로포장에 대해 책임건설사업관리기술자 보고내용과 같이 승인하고(공사비 증액 161백만원),

❍ 향후 본부 설계변경소위원회 심의를 거쳐 설계변경 조치하고 총사업비 변경 시 반영코자 함.

붙임 : 실정보고 1부.  끝.