문서번호	교량안전과-19840
결재일자	2018.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
우창원		정준용	11/13 김종호
협조

한강상 PSC교량 안전강화공사(원효대교)

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

안전총괄본부

(교량안전과)

한강상 PSC교량 안전강화공사(원효대교)

설계변경 검토 보고

우리시와 도급계약을 체결하고 시행중인『한강상PSC교량 안전강화공사(원효대교)』시행과 관련 한강교량 보수·보강공사 건설사업관리용역 감리단으로 부터 설계변경 보고서가 제출되어 이에대한 설계변경 검토 보고 사항임

□ 관련근거

○ 동성감리 제2018-742(2018.11.9.) 설계변경 도서제출

(2018년 한강상 PSC교량 안전강화공사-원효대교)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 한강상 PSC교량 안전강화공사(원효대교)

○ 공사기간 : 2018.05.25. ~ 2018.11.20.

○ 공사금액 : 1,678,130,500원

(도급비 1,430,526,900원, 관급비 270,737,600원, 이전비 76,866천원)

○ 시  공  사 : 에스디그룹(주) 대표 허찬배

○ 감  리  사 : ㈜동성엔지니어링외 2개사

○ 공 사 개 요 : 절삭후아스팔트덧씌우기 91a, 상판보수 1,090㎡

□ 설계변경 검토 내용

○ 관급비(아스팔트콘크리트) 및 폐기물 처리비 실정보고분 반영(교량안전과         -19199호, 2018.11.5.)

○ 신규비목 단가적용 협의결과 반영(교량안전과-19238, 2018.11.5.)

○ 배수구 구간 수량 공제(교면방수, 성형 및 주입줄눈, 유공관)

○ 상판보수 시공 구간 바탕처리 수량 공제 및 차선도색 실 수량 정산

○ 제경비(국민연금, 건강, 고용, 노인장기, 안전관리비, 환경보전비등)        정산

○ 주요 수량 변경

공 종		단위	당초	변경	증,감
포장공	아스팔트 절삭	㎥	728	736.8	증)8.8
	텍코팅	a	91	90.8	감)0.2
	절삭후 아스팔트 덧씌우기	a	91	90.8	감)0.2
교면방수공	교면방수 - 바탕처리	㎡	9,094	8,000.2	감)1,093.8
	교면방수 - 복합식	㎡	9,094	9,082.7	감)11.3
	성형줄눈 및 주입줄눈 설치	m	2,441	2,373.5	감)67.5
교량상부공	상판보수 t=30mm	㎡	327	322	감)5
	상판보수 t=50mm	㎡	763	760.5	감)2.5
	차선도색(백색)	㎡	327	310	감)17
방수재 가열 및 용해비(쿠커 5톤 사용)		㎡	9,094	9,082.7	감)11.3

□ 공사비 증ㆍ감현황

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증ㆍ감(원)
도급액	1,430,526,900	1,352,967,000	(감)77,559,900
관급자재비	170,737,600	221,242,560	(증)50,504,960
이전비 기타	76,866,000	63,613,000	(감)13,253,000
총공사비	1,678,130,500	1,637,822,560	(감)40,307,940

□ 검토의견 및 조치계획

○ 기 실정보고 및 설계변경 보고내용을 검토한 바, 적법하게 시행된 것으로 판단됨 ⇒  상기내용과 같이 설계변경 시행코자 함.

붙임 : 1. 설계변경도서 제출 서류 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 계약금액조정 검증 확인서 1부. 끝.