문서번호	교량안전과-19833
결재일자	2018.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
장재연		정회평	11/13 김종호
협조

「잠실대교 보수공사」 설계변경(정산) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

안전총괄본부

(교량안전과)

- 잠실대교 보수공사 -

설계변경(정산) 검토보고

본 공사와 관련 한강교량 보수·보강공사 건설사업관리단으로부터 설계변경 검토의견서가 제출되어 내용을 검토하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

❍ 동성-2018-713호(2018.11.05) 설계변경 검토의견서 제출

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 잠실대교 보수공사

❍ 공사기간 : 2018.05.24. ~ 2018.11.19.

❍ 공사금액 : 775,423천원

- 도급비 610,373천원, 관급비 131,130천원, 이전비(폐기물) 33,920천원

❍ 공사규모 : 교면방수 및 포장 71.6a, 바닥판 보수 27㎡

❍ 시공/감리 : 시공사 덕우건설㈜ / 감리사 ㈜동성엔지니어링

□ 설계변경 검토보고

❍ 설계변경 사유

- 설계도서 검토결과 등의 실정보고 승인분 반영 및 수량 정산 등

❍ 설계변경 주요내용

건 명	내 용	비 고
① 교량안전과-12809호 (‘18.07.19) ․아스콘 포장 및 방수면적 증가	․Ramp-H 초입부 교면 방수 및 포장(증 5.53a) ․Ramp-H 초입부 바닥판보수(증 45㎡)
② 교량안전과-14256호 (‘18.10.26) ․루프 검지선 이설 ․PS공종 단가 확정 반영 ․관급자재(아스콘) 및 이전비(폐기물) 정산 반영	․루프 검지선 이설(증 2개소) ․PS공종(방수재 가열 및 용융) 단가 확정 반영(증 77.1a) ․관급자재(아스콘) 및 이전비(폐기물) 정산 (증 285 ton)

□ 공사비 증·감내역

구 분	공 사 비 (원)			비 고
	당 초	변 경	증(감)
1. 교면보수공	105,292,852	119,053,312	13,760,460
2. 방수공	210,203,280	265,453,999	55,250,719
3. 상판보수공	9,113,850	28,214,607	19,100,757
4. 가시설공	506,680	-	-506,680
5. 부대공	12,362,990	15,794,217	3,431,227
6. 방수재 가열 및 용융(야간)	53,205,960	-	-53,205,960	PS단가
직접공사비 계	390,685,612	428,516,135	37,830,523
제경비	164,198,934	156,483,865	-7,715,069
공급가액	554,884,546	585,000,000	30,090,503
부가가치세	55,488,454	58,500,000	3.011,546
도 급 비	610,373,000	643,500,000	33,127,000
관급자재대	131,130,000	160,840,000	29,710,000
이전비(폐기물처리비)	33,920,000	35,070,000	1,150,000
총 공 사 비	775,423,000	839,410,000	63,987,000

※ 계약금액(제비율)조정 검증 결과 이상없음(붙임3 참조)

□ 처리계획 및 행정사항

❍ 설계변경 실정보고를 검토한 바, 기 승인사항을 적용하여 적정한것으로 판단되므로

- 건설사업관리단에 승인 통보하고 재무과로 설계변경 의뢰하고

- 공사비 증가분(63,987천원) 추가 예산은 본 공사의 낙찰차액을 활용코자함

붙임 1. 건설사업관리단 설계변경 검토의견서 1부.

2. 감리실정보고서 검토보고 각 1부.

3. 제비율 검증 결과 1부.  끝.