문서번호	설비부-15477
결재일자	2018.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김두환		유병기	11/13 권오식
협 조

- 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사 -

예비 준공검사(1차분) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

도시기반시설본부

설비부

- 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사 -

예비 준공검사(1차분) 계획 보고

중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사(1차)의 준공기한('18.12.10)이 도래함에 따라 관련근거에 의거 준공前 예비 준공검사를 다음과 같이 실시하여 공사 준공처리에 만전을 기하고자 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사

□ 공사위치 : 성동구 자동차시장3길 64일원(중랑물재생센터내)

□ 공사기간 : 총차 2017.11.24.~2020.01.23.

1차 2017.11.24.~2018.12.10.

□ 도 급 비 : 총차 금2,734,227,900원

1차 금302,170,000원

□ 계 약 자 : ㈜제이앤제이파워스 대표 박재옥

□ 감 리 자 : ㈜천일 외 1개사

□ 공 정 율 : 계획20%(실적19%)             비총인시설 전기공사

Ⅱ		관련근거

□ 책임감리 현장참여자 업무지침서(국토행양부 고시 제2012-542호,'12.08.21)

□ 제62조(예비준공검사)

□ 예비준공검사(1차분) 수행 계획 보고

□ 중랑감 제18-292호('18.11.12.)

- 공    사    명 : 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사(1차)

- 준공예정금액(1차) : 금302,170,000원

- 준공기한(1차) : 2018.12.10.

Ⅲ		예비준공검사 계획

□ 예비준공검사 일시 : 2018.11.16(목)

□ 예비준공검사 참여자

□ 검사자(소속직원 2명)

- 도시기반시설본부 설비부 열빛총괄과 담당자 외 1명

□ 입회자(감리원 1명, 현장대리인 1명)

- 건설사업관리기술자(전기1), 현장대리인(전기1)

□ 예비준공검사 내용

□ 준공기한(1차) 내(內) 준공가능 여부 및 미진사항의 사전 점검 보완

□ 감리원이 확인한 정산설계도서, 점검표 등에 의거 검사(지적사항 작성)

□ 예비준공검사 실시결과 조치계획

□ 예비준공검사 실시결과 지적사항에 대하여는 감리원에게 보완지시

□ 예비준공검사의 지적사항 등을 완전히 보완하고 책임감리원의 확인 후 준공검사원 제출

Ⅳ		향후 계획

□ 2018.12.10일 : 준공검사(1차분) 완료

따로붙임 : 예비준공검사 현장점검표 1부 . 끝.