문서번호	도시철도토목부-13351
결재일자	2018.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조태현		최진규	11/13 정대현
협 조
	주무관			정중규

「지하철 919공구 건설공사 」

보도복구 관련 현장 실정보고 검토

2018. 11.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『지하철 919공구 건설공사』

보도복구 관련 현장 실정보고 검토

『서울지하철 9호선 3단계 건설공사』추진 중 책임건설사업관리기술자로부터 보도복구 관련 현장 실정보고가 있어 아래와 같이 검토함.

- 관련근거 : 보도복구 재질변경 실정보고【수성(919) 2018- 701호(`18.11.10.)】

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

❍ 위     치 : 서울특별시 송파구 삼전동 ~ 송파구 석촌동

❍ 규     모 : 총 연장 1,560m

〔본선개착 96m, 터널 1,128m, 정거장(2개소) 336m〕

❍ 계약금액 및 공사기간

구 분	계약 금액(원)	공사 기간	비고
총체	211,191,000,000	2009.12.31. ~ 2018.12.31.
11차(금회)	18,921,000,000	2018.02.09. ~ 2018.12.31.

Ⅱ		추 진 경 위

❍ `09.12.31. : 공사 착공

❍ `11.06.15. : 실시설계 완료

실시설계 내용 → 보도 : 소형고압,  자전거도로 : 칼라투수콘

❍ `18.02.21. : 도로시설물(보도) 원상복구 계획에 따른 변경 및 추가정비

요청(송파구청 도로과)

보도블럭 : 소형고압 → 투수블럭 포장

자전거도로 : 칼라투수콘 → 아스콘 + 도막 포장

❍ `18.03.07.: 도로시설물(보도) 원상복구 관련 요청사항에 대한 회신

(도시철도토목부) ⇒ 요청사항 반영

Ⅲ		책임건설사업관리기술자 검토내용

❍ 변경 사유

- 실시설계 완료 이후 관리기관(송파구청)에서 보도블럭 및 자전거도로 재질변경 요청

※ 관련규정 : 지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건 제19조 제2항 제2호

❍ 현황도

9 3 1 S 1 환 기 구
9 3 2 정 거 장

9 3 3 정 거 장

❍ 보도포장 변경 현황

구분	당초	변경	비고
보도블럭	소형고압블럭	투수블럭	재질변경
자전거도로	칼라투수콘	아스콘+도막포장	재질변경

❍ 물량 및 공사비 변경 현황

(단위 : 백만원)

구 분		단위	당 초		변 경		증·감		비 고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
보도 블럭	931S1환기구	m²	59	1	59	2	-	1
	932정거장	m²	1,723	27	1,818	76	95	49
	933정거장	m²	1,898	30	2,138	89	240	59
소계			3,680	58	4,015	167	335	109
자전거 도로	931S1환기구	m²	39	1	39	2	-	1
	932정거장	m²	1,723	32	1,773	78	50	46
	933정거장	m²	85	2	164	7	79	5
소계			1,847	35	1,976	87	129	52
직접공사비				93		254		161
제경비				52		49		-3
총공사비				145		303		158

※ 단가적용 : 설계변경시점 협의단가 적용

❍ 책임건설사업관리기술자 보고내용

- 건설공사 추진중 보도복구 공사전 관리기관과의 협의 및 관련 근거에 의거 시공하여 개통전 보도복구를 시행하고자 산출된 사항으로 타당하다고 사료되며, 추후 설계변경시 조정된 계약금액을 반영 하고자 함.

Ⅳ		검토의견(조치계획)

❍ 상기 내용과 같이 보도복구 변경에 대해 책임건설사업관리기술자 보고내용과 같이 승인하고(공사비 증액 158백만원),

❍ 향후 본부 설계변경소위원회 심의를 거쳐 설계변경 조치하고, 총사업비 변경 시 반영코자 함.

붙임 : 관련문서 1부.  끝.