문서번호	계획설계과-8821
결재일자	2018.11.13.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
이동석	송헌영	최진석		11/13 구아미
협 조
	시설안전부장		이규상

『미아배수지 건설공사 기본계획 용역』 중간보고회 결과 보고

2018. 11.

상수도사업본부

(급  수  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	- TF팀 회의 (’18. 5.10) - 착수 보고 (’18. 7.18)
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『미아배수지 건설공사 기본계획 용역』 중간보고회 결과 보고

고지대 지역의 안정적인 급수 및 단수없는 급수체계 구축을 위해 추진 중인 “미아배수지 건설공사 기본계획 용역”에 대한 중간보고회를 개최하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		용역 개요

용역명	미아배수지 건설공사 기본계획 용역
사업위치	강북구 미아동 산108-3 일대
사업개요	․ 배수지 용량 : 10,000㎥ ․ 송배수관 부설 : 구경 500~600㎜, 연장 2.2㎞
용역기간	2018. 4. 2. ~ 2018.11.27.
계약금액	85,467천원
용역사	㈜ 대한콘설탄트

Ⅱ		중간 보고회 개요

❍ 일    시 : 2018. 11. 2.(금) 15:00~17:10

❍ 장    소 : 4층 회의실

❍ 참 석 자 : 시설안전부장 외 18명

- 내  부(14명) : 시설안전부장, TF팀원(13명)

※ 급수부장 : 현안업무로 출장(배수지 구조물 전문가 합동점검)

- 외  부(3명) : **************** 자문위원 3명

- 용역사(2명) : 사업책임기술자 및 사업별 책임기술자

※ 자문위원

분 야	성 명	소속 및 직위	비 고
상하수도	*****	**********	불참-서면의견 제출
상하수도	*****	**********
상하수도	*****	************
상하수도	*****	************

Ⅲ		보고 내용

❍ 착수보고 회의 주요 검토의견에 대한 반영 여부 및 결과

❍ 그간 추진사항 및 향후계획

❍ 배수지 및 송·배수관 시설계획

- 급수지역 인구, 급수량 재산정 검토내용

- 배수지 용량, 수위 검토내용

- 송·배수관로 수리검토 내용

※ 붙임 1 보고자료 참조

Ⅳ		자문위원 및 참석자 주요의견

❍ 착수보고시 지적된 수요량 산정방법에 대한 검토 의견

- 전반적인 수요량 산정 방법(급수인구, 원단위, 계획급수량)은 적절

․착수보고시 급수구역 면적비율로 수요량을 산정하여 지적된바 수도사업소에서 수전데이터를 받아 재산출

․배수지 용량산정결과 V=  9,300㎥ (체류시간 13Hr)

- 부지여건이 가능하다면 V=10,000㎥ 정도로 여유있게 기본계획을 수립함이 타당함

․한번 시공된 시설물을 증설이 어려우며 대체급수, 급수구역변경 등으로 용량이 부족할 가능성도 있음

❍ 중간보고 내용에 대한 검토 의견

- 경제적 관경 설정 후 수리검토를 통해 펌프 양정을 산정하고적정 여유수두를 확보

- 급수구역 관말 수압을 2.5kgf/㎠이상 확보가 바람직

- 미아가압장 펌프 개량시 펌프 대수 및 양정 산정 후 공사비 등 검토

- 수유증압구역을 추가하여 현재 및 장래 공급계통도를 정확히 표현

- 최종안으로 제시된 배수지 위치(향천사부지) 외에도 타 부지에 대한 안별 경제성검토 결과 등을 제시하여 부지 선정의 과정 및 결과를 알 수 있도록 조치

- 수유배수지계획(2012년 취소)시 부설된 송수관로를 미아가압장 유입부에 연결하여 비상급수(이중화)할 수 있도록 도면에 표시

- 사후 유지관리를 위한 사항을 고려하여 기본계획 수립

- 시공시 진동, 소음 등으로 인한 민원발생 저감방안 검토

Ⅴ		향후 계획

❍ 중간보고회 결과를 반영하여 용역 추진

❍ 용역 과업수행 기간 연장

- 산정용량을 반영한 구조물 계획을 수립하여 국립공원관리공단 협의

- 국립공원내 배수지 건설후 원상복구 내용 등 협의를 위해 과업수행기간 연장

당초 : ’18.11.27.(화) → 변경(안) : ’19. 2.28.(목)

❍ 최종보고회 개최 : ’19. 2월 중(예정)

붙 임 : 1. 착수보고(PPT) 자료 1부

2. 회의전경 1부

3. 회의 참석자 현황 1부

4. 자문의견 각 1부. 끝.