투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(3공구) 변경 계약의뢰(총괄5회, 3차1회)

1. 도시철도사업부-10443(2018.11. 9.)호와 관련입니다.

2. 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(3공구)과 관련하여 공구경계 조정, 안전관리 강화를 위한 감리원 추가투입 및 물가변동으로 인하여 아래와 같이 변경계약 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(3공구)

나. 계 약 자 : ㈜수성엔지니어링 외 2개사

다. 용역기간

구 분	당 초	변 경	비 고
총 괄	2011.11. 1 ~ 2022. 3. 7	변경없음	변경없음
3 차	2018. 4.25 ~ 2019. 4.30	2018. 4.25 ~ 2019. 2.18	감) 71일

라. 용역금액 조정 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	사 유
총괄 (5회)	2,549,640,000	3,099,600,000	증)549,960,000	- 공사비 변동, 감리원 추가투입, 물가변동률 반영
3차 (1회)	464,000,000	464,000,000	-	- 감리원 추가투입,물가변동률 반영

마. 예산과목

- 신교통수단도입, 경전철 건설사업, 신림선 경전철 건설, 시설비 및 부대비, 감리비(도시철도특별회계)

붙  임   1. 계약금액 조정 검토보고서 1부

2. 감리 변경설계서(총괄 5회 및 3차 1회) 각 1부.

3. 총괄 5회 변경설계서 1부.

4. 3차 1회 변경설계서 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

	도시철도사업부장
주무관	윤대희		경전철1과장	최문기		도시철도사업부장	11/13 박동룡
협조자	주무관	오상협		경리과장	이현숙
시행	도시철도사업부-10541	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 9층 도시철도사업부	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7181	/전송	02-772-7305	/	cals97@seoul.go.kr	/	부분공개(7)