문서번호	건축부-16192
결재일자	2018.11.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		의료시설과장	건축부장
문성재		이형재	11/14 임인구
협조
	주무관		조문석

『시립중랑노인전문요양원 증축공사』

매립폐기물 2차선별 및 토공정산 실정보고 검토

2018. 11.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『시립중랑노인전문요양원 증축공사』

매립폐기물 2차선별 및 토공정산 실정보고 검토

본 현장 토공사 중 발생한 지중매립폐기물 선별비 등 정산 승인요청이 있어 기 정산(폐섬유, 폐콘크리트 등) 수량과 2차 선별비, 토공사 정산 및 공사비를 보고 함

공사개요

○ 용 역 명 : 시립중랑노인전문요양원 증축공사

○ 위    치 : 중랑구 양원역로 38(망우동 북부병원)

○ 규    모 : 지하1층/지상5층, 연면적 2,280.35㎡

○ 공사기간 : `17.12.20. ~ `19. 6.19.

○ 계약금액 : ***********************************

○ 시공자/감리사 : 용성종합건설㈜ 외 1개사/펨코엔지니어링(주) 외 1개사

○ 현 공 정 : 구조체 공사(4층 외벽 거푸집 및 철근배근 중, 공정율: 38.5%)

추진경위

○ `17. 12. 20. : 공사착공

○ `18. 02. 28. : 주차장, 조경 등 철거공사

○ `18. 03. 29. : 흙막이 H파일 천공, 근입, 계측기 설치

○ `18. 07. 15. : 굴토공사 완료

○ `18. 07. 26. : 기초 콘크리트 타설

○ `18. 10. 02. : 지상2층 바닥 슬래브 콘크리트 타설

○ `18. 11. 03. : 지상4층 바닥 슬래브 콘크리트 타설

위 치 도	조 감 도

실정보고 내용

○ 보고근거

- 2018.05.09.: 건축부-6370(지중매립폐기물 발생 실정보고)

- 2018.06.20.: 건축부-18-6285(사토장 선정 및 사토거리 정산)

- 2018.08.28.: 건축부-12163(지중매립폐기물 폐섬유 정산 및 처리방법 변경)

- 2018.11.05.: PC18(시립요양원)-167호(매립폐기물 2차 선별 및 토공 정산 실정보고)

○ 2차 선별 토사량

- 폐기물 선별/상차: 장비(체 버킷 + 인력)

· 1일 작업량= Q * 8hr= 15.28㎥/ 8hr= 122.24㎥/일, 인력2(공사장1, 사토장1)

- 매립토층 토사량 2,091.08㎥ - 최초 사토반출량 384㎥ = 1,707㎥(사토대장 참조)

○ 지중매립폐기물량 확정(지중매립 폐기물 = 섬유폐기물 + 폐콘크리트, 폐블록 등)

구 분	당 초	변 경	관련근거(변경)
********	******************	**********************	******** *********
**************	******************	**********************
***********	******************	**********************
*	**************	******************	********

○ 사토량 증감사항

구 분	당 초	변 경	관련근거(변경)
********************	************	******************	*********
**************************	**************	*****************	****************

공사비(설계변경) 증감 내용

○ 지중 매립폐기물 2차선별 및 토공사비 증감내역 검토                 (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
*******	**********	**********	***********
*******	**********	***********	***********
********	*********	**********	**********
*****	**********	***********	***********

○ 지중 매립폐기물 2차선별 및 토공사비 증감 상세내용                 (단위: 원)

변 경 항 목			규격	단위	수량	단가	금 액	증 감	비고
*****	*************	**	*** ***	*	***	*****	*******	********
		**			***	*****	*******
	************	**	** ****	*	*****	*****	*********	********
		**			*****	*****	*********
	************	**	**	*	*****	******	**********	**********
		**			*****	******	**********
	******	**	*** **	*	*	*	*	***********
		**			*****	*****	**********
	******	**		*	*	*	*	**********
		**			*****	*****	*********
****** **		**					**********	***********
		**					**********

○ 단가 적정성 검토

- 2차 선별비 단가: 1차 선별비 단가적용(건축부-6370 실정보고 승인, 2018. 5. 9.)

- 기타 철거공사 상차비, 구조물 터파기는 계약단가, 사토는 정산단가 적용

○ 감리자 검토 의견

- 시공사 2차 선별비 실정보고 사항은 설계내역에 반영되지 않은 매립토층에 혼입된 각종 폐기물(건설폐재류, 폐콘크리트, 폐섬유 등)을 “건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침”(환경부예규 제629호, 2018.1.16.)에 따라 분리/선별 처리 추가반영, 상차비, 터파기 물량, 사토량 정산

- 지중매립폐기물 처리완료(2018.7.14.), 사토장선정 및 사토거리 정산 실정보고 승인(2018.6.20. 도시기반시설본부-18-6285)에 따라 사토량 정산 및 사토는 정산단가 적용

- 위와 같이 검토결과 시공사의 설계변경 요청사항은 타당하다고 판단됨

처리의견

○ 위와 같이 공사부지 내 지반에 섞여있는 폐기물(폐콘크리트, 폐섬유 등)을 관련법령에 따라 선별(2차) 배출/상차 및 토사량 정산 및 사토단가 등 실정보고 내용이 적합함으로 공사내역 등 설계변경에 반영토록 승인(도급공사에 반영)하고자 함

붙임  토공사 매립폐기물 2차선별 및 토공 정산 실정보고 기술검토 보고 1부.  끝.