문서번호	도시철도토목부-13383
결재일자	2018.11.14.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
정중규		최진규	11/14 정대현
협 조
	주무관			조태현

「지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사」

강재 손료 조정 실정보고 검토

2018. 11.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사」

강재 손료 조정 실정보고 검토

「9호선 3단계 919공구 건설공사」와 관련 강재 손료 조정 실정보고가 있어 이에 대한 검토 보고임.

※관련문서 : 수성제2018-706(‘18.11.13) 강재 손료 조정 실정 보고

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

❍ 공사개요

- 총연장  1,560m

□ 본  선 : 1,230m(개착 96m, 터널 1,134m)

□ 정거장 : 330m(2개소)

❍ 공 사 비 : 211,191백만원

❍ 공사기간 : '09.12.31~'18.12.31

❍ 시 공 사  : 삼성물산(주) 대표이사 최치훈 외 2개사

❍ 감 리 단 : ㈜수성엔지니어링 외 4개사

Ⅱ		관련근거

❍ 9호선 3단계 기본계획 변경 알림 : 도시철도토목부-14391(’16.11.18)

- 사업기간 변경 : 당초 ’15년 → 변경 ’18년 (3년 연장)

Ⅲ		감리단 보고내용

❍ 강재 시공 현황

강재설치
			(당초)			(변경)
강재해체
			(당초)			(변경)

구분	`10				`11				`12				`13				`14				`15				`16				`17				`18
931S1환기구
				************
								******							******
																									*********
					**********												**********								*********
																						******											******
																																	*********
931S2E2환기구
																									*********
				**********										**********											*********
																										******					******
																																	*********
932정거장
				************
								********													********
																									***********
				************																**********					**********
																*********									******						********
																																	*********
932S1E1환기구
				************
																******															******
																																	*********
933정거장
				*************
										********											*******
																									************
		************																**********							************
																	*******								********						********
																																	***********

- 준공기한이 당초 ’15년말에서 ’18년말로 변경〈3년 연장〉

- ’15.12.29.이후 존치 강재의 존치기간 증가에 대하여 손료 조정 필요

(당초 손율 : 23.6% ~ 38.4%, 조정 손율 : 70%)

❍ 강재 손료 조정 현황

- 강재 조정 대상 물량

(단위 : 톤)

구분	총물량 (A)	해체물량(B) (’15.12.까지)	제외물량(C)			대상물량(D) (D=A-B-C)
			매몰	존치기간부족	’16.1.이후 설치물량
계	22,576	4,727	2,247	1,448	2,738	11,416
931S1	1,355	428	199	-	45	683
931S2E2	1,140	-	115	369	31	625
932정거장	7,491	1,863	600	534	287	4,207
932S1E1	1,021	346	149	47	-	479
933정거장	11,569	2,090	1,184	498	2,375	5,422

- 강재 존치기간 현황

구 분		전체수량	설치일	해체일	존치기간	손 료	손료70%도달일
931 S1 환기구	소계	1,355
	중앙파일	129	2011.03월	2018.01월	2,498일	38.4%→70.0%	884일
	주형보&복공판	438	2011.07월	2018.01월	2,376일	37.9%→70.0%	840일, 800일
	버팀보	116	2011.10월	2018.01월	2,261일	23.6%→70.0%	1,009일
	버팀보	428	-	-	-	-	제외(`15년 이전 해체)
	버팀보	45	2011.11월	2015.07월	-	-	제외(존치기간부족)
	매몰	199					제외
931 S2,E2	소계	1,140
	중앙파일	208	2011.02월	2017.07월	2,342일	38.4%→70.0%	884일
	주형보&복공판	417	2011.05월	2017.07월	2,283일	37.9%→70.0%	840일, 800일
	버팀보	369	2012.02월	2016.08월	-	23.6%→50.0%	제외(존치기간부족)
	버팀보	31	2014.03월	2015.12월	-	-	제외(존치기간부족)
	매몰	115					제외
932 정거장	소계	7,491
	중앙파일	1,526	2011.02월	2017.07월	2,342일	38.4%→70.0%	884일
	주형보&복공판	2,417	2011.04월	2017.07월	2,283일	37.9%→70.0%	840일, 800일
	버팀보	264	2012.02월	2016.07월	1,080일	23.6%→70.0%	1,009일
	버팀보	1,863	-	-	-	-	제외(`15년 이전 해체)
	버팀보 등	534	2015.01월	2017.05월	800일	23.6%→55.0%	제외(출입구)
	버팀보 등	287	2015.01월	2015.12월	-	-	제외(존치기간부족)
	매몰	600					제외
932 S1,E1	소계	1,021
	중앙파일	105	2011.02월	2017.07월	2,342일	38.4%→70.0%	884일
	주형보&복공판	374	2011.05월	2017.07월	2,253일	37.9%→70.0%	840일, 800일
	버팀보	346	-	-	-	-	제외(`15년 이전 해체)
	버팀보	47	2011.06월	2014.08월	-	-	제외(존치기간부족)
	매몰	149					제외
933 정거장	소계	11,569
	중앙파일	971	2010.11월	2017.07월	2,434일	38.4%→70.0%	884일
	주형보&복공판	3,495	2011.04월	2017.07월	2,342일	37.9%→70.0%	840일, 800일
	버팀보	956	2011.03월	2016.12월	1,772일	23.6%→70.0%	1,009일
	버팀보 등	2,090	-	-	-	-	제외(`15년 이전 해체)
	버팀보 등	498	2014.04월	2016.1월	570일	23.6%→39.5%	제외(출입구 1,2,5,6)
	버팀보 등	2,375	2017.02월	2018.8월	510일	23.6%→35.3%	제외(출입구 3,4,7,8, 자전거주차장 등)
	매몰	1,184					제외

- 공사비 증감 현황

(단위:백만원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
직접공사비	3,962	7,493	증 3,531
제경비	1,141	2,152	증 1,011
공사비계	5,103	9,645	증 4,542

Ⅳ		책임감리원 검토의견

❍ 지하철9호선 3단계 사업기간 연장에 따른 강제손료 변경은 건설공사 표준품셈 및 도시기반시설본부 설계기준에 적합하여 설계변경은 적정함.

Ⅴ		처리의견

❍ 상기 내용과 같이 서울지하철9호선 3단계 사업기간 변경으로 연장된 기간에 존치된 강재의 손료 증액분 반영은 적정하여 본부 설계변경 심의위원회 자문 시행 후 반영 처리코자 함.(공사비 증액 :4,542백만원)

따로붙임 : 관련문서 1부.  끝.