투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	금천 박미사랑공원 조성공사 준공기한 연기 시행

우리 부서에서 시행하고 있는『금천 박미사랑공원 조성공사』에 대하여 다음과 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 금천 박미사랑공원 조성공사

2. 공사기간 : 2018. 7. 2. ~ 11. 15.

3. 도급금액 : 금438,956,900원(변동없음)

4. 도 급 자 : 큰빛종합건설(주) 대표 김현철, 세인조경(주)대표 이현룡(주계약자공동도급)

5. 연기 준공기한 : 2018. 7. 2. ~ 11. 30.

6. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소

7. 지연배상금 부과여부 : 미부과

8. 연기사유 : 금천구청 요구사항 반영 및 서울시 도시기반시설본부 도로부지 계단설치 시행 지연 등에 따른 절대공기 부족

붙 임  준공기한 연기 검토 보고서 1부.  끝.

주무관							최현주				조경시설팀장					이용원					시설과장					문인기					서부공원녹지사업소장						11/14 代배효성
협조자
시행			시설과-2703										(						)		접수												(						)
우	03901					서울특별시 마포구 월드컵로 243-60																/			http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화		02-300-5544							/전송			02-300-5527					/	green00@seoul.go.kr													/	대시민공개