문서번호	건축부-16286
결재일자	2018.11.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
김완선		代김찬유	11/14 임인구
협조
	주무관		김동석

「서울시 근로자복지관 증축공사」

관급자재 AL창호 실정보고 검토보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「서울시 근로자복지관 증축공사」

관급자재 AL창호 실정보고 검토 보고

「서울시 근로자복지관 증축공사」중 관급자재 AL창호에 대한 실정보고가 접수   되어 이에 대해 검토 및 보고드림.

1		공 사 개 요

위    치 : 영등포구 국회대로 44길 10 (현. 한국노총 서울지역지부)

규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 3,768.24㎡

용    도 : 노유자시설(근로복지시설)

공사기간 : `18. 10. 1. ~ `19. 5. 31.

총공사업비 : 27억원(시설비 25억원, 감리비 1억원)

시 공 사 : 우성토건(주), ㈜천연석건

건설사업관리용역사 : ㈜영진엔지니어링 외 1

2		실정보고 내용

관련문서

- 영진근복 제18-16호(2018. 11. 08.) “관급자재(AL.창호) 수량변경 실정보고” 제출

관련규정

- 「공사계약 일반조건」제19조(설계변경 등) 제①항의

1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있는 경우

- 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제81조             (공사착수단계 설계도서 등 검토업무)에 의거 사업관리단 검토에 대한 설계사 의견서

검토 내용

① AW-6(FIX) 중간 BAR 추가 설치

- 당초 6층 대강당 천창 설계시 AW-6(FIX) 중간 BAR가 7등분으로 설계되어 암막롤블라인드 4개가 설치하면 중간 BAR와 일치하지 않아 햇빛 차단이 불가능하고

- AW-6(FIX)를 8등분으로 설계변경하여 중간 BAR와 일치시켜 햇빛 차단에 유리하도록 변경이 필요함(7등분→8등분)

변경 내용

변경사항	세부사항	비고
	변 경
6층 대강당 천창 시공 (중간 BAR 6개→7개)		검토 의견서 첨부제출함

3		예상공사비 검토

공사비 증감 현황

(단위: 원)

구 분	변경전	변경후	증감	비고
관급 공사비 (AL. 창호)	**********	**********	********
합 계	**********	**********	********

4		건설사업관리자 및 설계자 검토의견

건설사업관리자 의견

- 6층 대강당 천창 햇빛 차단을 효율적으로 하기 위해 AL. 창호 형태를 변경함이 타당하다고 판단됨.

설계자 의견

- 암막블라인드의 시공성을 감안하여 천창 프레임을 변경함이 타당하다고 사료됨.

4		처리의견

실정보고 건은 시공성을 감안하여 증/감 되는 부분이며, 건설사업관리자의 검토의견을 참고하여 실정보고 승인 처리하여 수량 및 변경금액 등은 준공 전 정산하여 공사 추진에 차질이 없도록 조치코자 함.

붙임: 금속, 창호공사 실정보고서 1부.  끝.