문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-5167
결재일자	2018.11.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	북서울꿈의숲관리사무소장
조양연		김희태	11/14 김한준
협조

북서울꿈의숲

방문자 주차장 진입로 개선공사 추진계획

2018. 11.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲)

북서울꿈의숲

방문자 주차장 진입로 개선공사 추진계획

북서울꿈의숲 방문자 주차장 진입로가 협소하여 버스 등 대형차량의 진입에

어려움이 있어 진입로를 확장 정비하여 공원 이용 차량 불편 민원을 해소하고자 함.

1		추진근거

○ 북서울꿈의숲 방문버스 불편사항 개선을 위한 전문가 자문 결과 보고
(북서울꿈의숲관리사무소-4721호, 2018.10.19.)

2		사업개요

○ 사 업 명 : 방문자 주차장 진입로 개선사업

○ 위    치 : 북서울꿈의숲 방문자 주차장 진입부(2번 입구)

○ 사업기간 : 2017. 11.(착공일로부터 25일)

○ 사업내용 : 화단 일정 부분 철거(지장물 이설)하여 진입로 확장

- 철거공 : 경계석 철거 등 8종

- 이설공 : 공원가로등(분리발주), 주차관리센서(분리발주), 안내판 등

- 이식공 : 회양목, 철쭉 등

- 시설물공 : 경계석 설치, 아스콘포장, 차선도색 등

○ 사 업 비 : **************************

○ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 운영,
북서울 꿈의숲 및 서울창포원 유지관리, 시설비

3		추진방법

○ 공사저촉 공원가로등 이설(비용5백만원)은 관련 규정에 따라 분리발주 하고

○ 주차관제센서는 이설 비용과 신설 비용을 검토한 바 비용 차이가 크게 나지 않고 유지관리에 우수한 신설 구매(관급자재 9백만원)로 설치코자 함.

○ 계약방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 가목

- 수의계약 사유 : 추정가격이 소액이며, 공사 경험이 풍부하고 우수한 기술력을 확보한 업체

4		추진일정

○ 2018. 11. : 현장조사 및 이설공 분리발주 시행

○ 2018. 11. ~ 12. : 이설공에 맞추어 공사 시행 및 준공

붙임  1. 전문가 자문결과 보고서  1부.

2. 설계내역서 1부.  끝