문서번호	교량안전과-19981
결재일자	2018.11.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
정동익		유제천	11/14 김종호
협조

탄천1교 내진성능 보강공사 설계변경(3회) 검토보고

2018. 11.

안전총괄본부

(교량안전과)

탄천1교 내진성능 보강공사 설계변경(3회) 검토보고

본 공사와 관련 건설사업관리단으로부터 설계변경 검토의견서가 제출되어 내용을 검토하고 그 결과를 보고 드림.

관련 근거

❍ 감리18-1142호(‘18.11.12.) 설계변경(3회) 검토의견서 제출[탄천1교 내진성능 보강공사]

공사 개요

❍ 공 사 명 : 탄천1교 내진성능보강공사

❍ 공사기간 : 2017.12.18. ~ 2018.11.30.

❍ 공사내용 : 받침장치교체 64EA(면진받침), 전단키 설치 2EA, 부력방지키 보수 1식, 교량인상 1식 등

❍ 총공사비 : 1,340,698천원(도급비 1,340,698천원)

❍ 시 공 사 : ㈜다함테크

검토내용

❍ 설계변경 근거

- 교량안전과-17087호(‘18.10.01.) : 탄천1교 내진보강공사 실정보고(3회)에 대한 검토 보고

❍ 설계변경 사유

- 실정보고(3회) 승인요청사항에 대한 승인결과를 설계변경에 반영

- 실물량 및 제경비 정산 등

❍ 물량 증․감내역

공 종	규 격	단위	수 량
			당 초	변 경	증 감
강재도장(내부)	바탕처리B급, 중방식(현장2회)	M2	151	81	(감) 70
용접부파쇄	(T=10MM) (거더-솔플레이트)	M	163	54	(감) 109
FILLET (현장,상향)용접	(T=10MM)	M	322	206	(감) 116
강관비계	10m이하,3개월	M2	2,845	272	(감) 2,573
보행안전도우미	20일*2인	HR	448	-	(감) 448
고철설	용해용(중)(매입가)	TON	2.586	70.828	(증)68.242

❍ 산업안전보건관리비 및 환경보전비 검토

공 종	단위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증 감
산업안전 보건관리비	원	20,283,436	7,610,355	(감)12,673,081	건설재해예방 기술지도비, 개인보호구, 안전장구 구입
환경보전비	원	8,358,111	-	(감) 8,358,111

❍ 공사비 증․감 내역

구 분	공 사 비(단위 : 원)			비 고
	당 초	변 경	증(감)
총공사비	1,340,698,000	1,104,470,000	(감) 236,228,000
도 급 비	1,340,698,000	1,104,470,000	(감) 236,228,000
관급자재	-	-	-
이 전 비	-	-	-

검토의견 및 조치계획

❍ 건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경 검토보고에 대하여 검토한 바 타당한 것으로 판단되어 상기내용과 같이 설계변경 시행조치

붙임 1. 실정보고(3회)에 따른 검토보고 1부.

2. 건설사업관리단 설계변경(3회) 검토의견서 1부.  끝.