＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	중부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰 (장위동246-173~189호호 외 6개소 배급수관 정비공사)

1. 우리사업소에서 서울특별시시설관리공단에 위탁 감독의뢰하여 시행중인 『장위동246-173~189호 외 6개소 배급수관 정비공사』에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 장위동246-173~189호 외 6개소 배급수관 정비공사

나. 도 급 자 :***************

다. 공사기간 : 2018.04.09.~2018.11.14.

라. 설계변경내용 : 물량증감 및 신공종발생

마. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비(시설비),노후상수도관(배급수관)정비

(단위 : 원)

구분	계약금액(당초)	계약금액(변경)	증 감	비고
도급비	527,517,470	475,200,000	감) 52,317,470
공급가액	479,561,337	432,000,000	감) 47,561,337
부가세	47,956,133	43,200,000	감) 4,756,133

붙임 : 1. 설계변경 심의위원회 개최 결과보고 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율 검증 및 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	이승환		주무관	한상근		시설관리과장	11/14 허준행
협조자
시행	시설관리과-32060	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2205	/전송	3146-2239	/	leesh79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)