투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	주식회사 태영알앤디
(경유)
제목	2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사 설계변경 승인 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사에 대하여 “태영 2018(신)-84”으로 제출한 설계변경서 내용을 승인하고 변경계약 체결하였으니, 감리업무 처리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명: 2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사

나. 계약업체: 공사업체- 새한전설 주식회사, 감리업체- (주)태영알앤디

다. 변경 승인내용 및 금액: 설계변경내역서 참조

구 분	당 초	변 경	증 감
도 급 비	17,146,800원	22,840,400원	증) 5,693,600원

라. 공사기간: 2018. 3. 22.~2018. 11. 24.

마. 기타사항

- 굴착 및 교통통제 등이 필요시 해당 관계기관 협의 및 홍보 시행

- 교통관리 및 안전관리 철저

- 천재지변 및 기타 등의 사유로 작업기간 지연 우려 시 사전 협의 시행

붙임  내역서 및 도면(별도) 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	노민영		기전과장	11/15 代윤석주
협조자	주무관	정영술
시행	기전과-10711	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8406	/전송	02-300-8410	/		/	대시민공개