문서번호	기전과-6547
결재일자	2018.11.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
김동현	11/15 정판식

교통신호기 원인자공사 변경승인 검토 보고

「청담동 삼성생명빌딩 신축공사 중 교통안전시설물 설치공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

동부도로사업소

(기전과)

교통신호기 원인자공사 변경승인 검토 보고

청담동 삼성생명빌딩 신축공사 중 교통안전시설물 설치공사 관련 교통신호기 원인자공사 준공일 변경요청에 대하여 검토 보고함

공사개요

○ 공 사 명 : 청담동 삼성생명빌딩 신축공사 중 교통안전시설물 설치공사

○ 공사위치 : 강남구 청담동 3

○ 공사기간 : 승인일 ~ 2018. 12. 31.

○ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계	감 리	시 공 사
신 호	*******	******	**********	******

검토내용

○ 변경사항 : 토목공사 지연으로 준공일 연기 요청

구 분	당초 준공일	변경 준공일	비 고
신 호	승인일 ~ 2018.11.09	승인일 ~ 2018.12.31

○ 승인조건

- 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음

- 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인 서류를 제출하여야 하며, 변경사항(교통안전시설 심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함

- 각종 안전사고 예방을 위해 전기인입선, 맨홀, 기초 등의 제거작업 철저

- 기타 사항은 경찰청「교통신호기 설치․관리 매뉴얼」, 서울특별시「교통신호기공사 업무처리 가이드라인」준수사항 이행 철저

- 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

검토의견

○ 삼성물산(주)에서 시행하는 교통신호기 원인자공사 준공일 변경요청에 대하여 현장확인 및 승인서류를 검토한 바 적정하므로, 조건부 승인처리 하고자 합니다.

붙임 : 준공일 변경 요청 공문 1부.  끝.