문서번호	시설과-2719
결재일자	2018.11.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	조경시설팀장	시설과장
최현주	이용원	11/15 문인기
협 조

『금천 박미사랑공원 조성공사』

실정에 대한 승인요청(4회) 검토보고

2018. 11.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

『금천 박미사랑공원 조성공사』

실정에 대한 승인요청 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『금천 박미사랑공원 조성공사』의 감독기관인 서울시설공단의 공사 진행 중 실정사항 승인요청(4회)에 대해 아래와 같이 검토 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 금천 박미사랑공원 조성공사

○ 공사기간 : 2018. 7. 2. ~ 11. 30.

○ 사업내용 : 토공, 우상수공, 포장공, 정자 등 시설물 17종 설치, 수목 식재 등 공원조성

○ 도 급 액 : 금438,956,900원(관급자재비 별도)

○ 도 급 자(주계약자 공동도급방식)

- 주계약자 : 큰빛종합건설(주) 대표 김현철

- 부계약자 : 세인조경(주) 대표 이현룡

○ 감 독 청 : 서울시설공단 공사감독 3처

Ⅱ		실정보고 검토내용

○ 관련근거 : 서울시설공단 공사감독3처-12131호(2018.11.14.)

○ 실정 보고사항

구 분	현황 및 문제점	검 토 결 과	비고
우배수	▸기존옹벽 데크계단 측면 및 하부 우배수관 보완 (금천구 요청사항)	▸우배수관 보완 - 우수관(D150) 8 → 30m - 빗물받이(410*510) 1 → 2개소 - 그레이팅(200*100*T4.5) 0 → 4m

구 분	현황 및 문제점	검 토 결 과	비고
포장	▸도기본 계단 연결부 황토 포장 추가(발주청 요청)	▸계단연결부 황토포장 반영 - 보조기층 46.17 → 47,69㎥ - 혼합기층 36.45 → 37.65㎥ - 흙콘크리트(T100) 243 → 251㎥
시설	▸현장진입로 볼라드 및 데크계단 난간휀스 증가	▸볼라드 및 안전휀스 증가 반영 - 볼라드(H850, 이동식) 0 → 5조 - 안전휀스(W1600*H1200,데크난간용) 24경간(3차승인) → 28경간
식재	▸조경석쌓기 상단부 회양목 추가식재(발주청요청)	▸회양목 추가식재 반영 - 회양목(0.3*0.3) 560 → 900주
	▸조경석쌓기 상단부 회양목 식재로 사이목 조정 불가피	▸조경석쌓기 사이목 수량 및 군식은 위치 조정(군식 북쪽 옹벽뒷면 식재예정) - 조경석쌓기 사이목 · 산철쭉(0.3*0.3,단식) 188 → 103주 · 산철쭉(0.3*0.3,군식) 0 → 85주 - 조경석쌓기A 사이목 · 산철쭉(0.3*0.3,단식) 147주(3회승인) → 81주 · 산철쭉(0.3*0.3,군식) 0 → 66주 - 조경석쌓기 사이목 보완(전체) · 회양목(0.3*0.3,단식) 170주(3회승인) → 94주 · 회양목(0.3*0.3,군식) 0 → 76주 · 남천(H0.8*2지,단식) 170주(3회승인) → 0 · 남천(H0.6*2지,단식) 0 → 94주 · 남천(H0.6*2지,군식) 0 → 76주
관급자재	▸상기사항으로 관급자재 조정	▸관급자재 조정 - 안전휀스(W1600*H1200,데크난간용) 126경간(3차승인) → 130경간 - 흙콘크리트(T100) 243 → 251㎥

Ⅲ		변경금액(개략공사비)

구 분		금 액(단위:천원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		572,140	602,140	31,414
도급비	공급가액	399,052	403,443	4,391
	부가세	39,905	40,344	439
	도급비계	438,957	443,787	4,830
관급자재비		130,210	155,380	25,170
상수도인입비		2,973	4,387	1,414

※ 개략공사비로 현장상황에 따른 경미한 변경은 향후 설계변경시 반영예정

Ⅳ		검 토 의 견

○ 위 실정보고 사항에 대하여 검토 시행토록 승인 처리하고 준공 전 설계변경 시행코자 함.(증액분은 본 사업 낙찰차액 활용)

붙 임 : 실정사항 승인요청 관련 공문 1식.  끝.