문서번호	건강관리과-16971
결재일자	2018.11.15.
공개여부	비공개
방침번호

주무관		가정건강팀장		건강관리과장		보건소장
김지우		代김지우		김혜심		11/15 김경희
협조
	보건위생과장		장완수

★ ◉

성동 산모건강증진센터

인테리어 공사 시행 계획

2018. 11.

성   동   구

(건강관리과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [√ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [√]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [√] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

성동 산모건강증진센터 인테리어 공사 시행 계획

모성 및 영유아의 평생건강기반 구축마련 및 임신준비부터 육아까지 전문적이고 체계적인 통합건강관리 서비스를 제공하는 『성동 산모건강증진센터』 인테리어 공사를 추진하여 개소 준비에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

○ 지역보건법 제3조(국가와 지방자치단체의 책임)

○ 성동 모자건강센터 설치․운영 계획(건강관리과-7321, 2017. 4. 28.)

Ⅱ		사업개요

○ 사 업 명: 성동 산모건강증진센터 인테리어 공사

○ 위    치: 서울 성동구 마장로23길10(보건소 4층)

○ 면    적: 지상1개층 332.4㎡

○ 사업내용: 보건소 4층 서울시 지방경찰청 유실물센터 일부를 건강관리존,

발달 체험존, 나눔소통존 등으로 결합된 모자건강센터로 리모델링

○ 운영시설: 모유수유실, 초음파 및 건강검진실, 성인접종실, 영유아 건강

검진실, 영양플러스, 커뮤니티 방 등

○ 소요예산: 150,000천 원

- 시설비: 130,000천 원

- 자산및물품취득비: 20,000천 원

Ⅲ		추진경과

○ 2017. 4. 26. 서울시 『모자건강센터 설치 지원』 공모 선정

- 시비 15,000천원 확보

○ 2017. 11. 7. ~ 12. 22 보건소 구조안전진단(내진성능평가 포함 용역)

- 진단결과: 정밀안전진단 → 종합평가(D), 내진성능평가: 붕괴위험

○ 2018. 4. 12. 성동구보건소 청사 보수공사 추진 계획 수립

- 구청장 방침 제125호(2018. 4.12.), 보건위생과-6847호(2018. 4. 12.)

○ 2018. 5. ~ 6. 성동 산모건강증진센터 인테리어 설계용역 완료

○ 2018. 9. 3. 서울시지방경찰청 4층 유실물센터 임시 이전

○ 2018. 9. 28. 보건소 청사 보수공사 설계용역 완료

- 성동 산모건강증진센터 인테리어 설계 보수공사 설계에 반영

○ 2018. 9. ~ 10. 보건소 청사 보수공사 발주 및 공사업체 선정 완료

○ 2018. 10. ~ 11. 보건소 청사 보수공사 시행

Ⅳ		설계용역 결과

○ 사 업 명:「산모건강증진센터 설치 공사」설계용역

○ 용역기간: 2018. 5. 10. ～ 7. 9.

○ 용역금액: 10,000천 원

○ 용역업체: 키오스크피오피건축(대표 서상하 외 1명)

○ 설계내용

구 분	설 계 내 용
실내건축	철거, 가설 공사, 바닥미장, 전기난방, 벽체, 천정, 화장실, 제작가구 등
기계설비	장비설치, 위생기구, 급수급탕배관,오배수배관, 냉난방기설치 등
전기통신	전기관, 배선, 배선기구, 조명기구, 통합배선(전화/LAN) 등

Ⅴ		공사발주계획

○ 공  사 명: 성동 산모건강증진센터 인테리어 공사

○ 공사범위: 성동 산모건강증진센터 인테리어 공사 중 실내건축 공정

※ 기계설비, 전기통신 공사는 보건소 청사 보수공사에서 추진

○ 공사기간: 착공일로부터 60일

○ 공사(예정)금액: 107,449,470원

※ 노무비, 재료비, 경비 상승에 따른 공사(예정)금액 2,449,470원 증가

(설계용역 공사예정금액: 105,000,000원)

○ 계약방법: 지역제한 경쟁입찰

○ 입찰참가자격

- 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』 제13조 규정 및

동법 시행규칙 제14조에 의한 자격요건을 구비한 업체

- 『건설산업기본법』규정에 의한 실내건축공사업 등록업체로서 입찰공고일 전일 부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지, 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

Ⅴ		소요예산

○ 소요예산: 107,449,470원

- 리모델링 공사비: 107,449,470원

※ 계약 낙찰차액 및 집행잔액  추가 공사비 등으로 사용

○ 예산과목

- 건강관리과, 건강 증진 및 삶의 질 향상, 모자보건사업, 모자건강센터 설치 및

운영사업(보조), 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅵ		향후계획

○ 2018. 11. ~ 12.: 산모건강증진센터 인테리어 공사 발주 및 업체 선정

○ 2019.  1. ~ 3.: 산모건강증진센터 인테리어 공사 착공 및 준공

○ 2019. 4. ~ 5.: 산모건강증진센터 집기류 구매 및 청소

○ 2019.  6. ~ 7.: 산모건강증진센터 개소식 및 운영

Ⅶ		행정사항

○ 감사담당관: 일상 감사 및 계약 심사

○ 보건위생과: 공사발주 및 감독

○ 보건소 전부서: 공사로 인한 민원 발생 최소화, 공사추진 협조.  끝.